문서번호	설비부-11703
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
나경운	장병선	08/17 김호성
협 조

- 삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립사업 -

소방공사 계약기간 연장 검토보고

2021. 08.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 삼양동 빈집홀용 복합커뮤니티시설 건립사업 -

소방공사 계약기간 연기 검토보고

『삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립사업 소방공사』관련 선행공정 지연에 따른 ‘1차수 공사에 대한 준공기한 연기 요청’건이 접수되어 아래와 같이 보고드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립 소방공사

▢ 공사위치 : 서울특별시 강북구 미아동 791-2521외 7필지

▢ 규    모 : 지상2층/지하2층, 3개동, 연면적 837.27㎡, 신축

▢ 계약현황

구분	계약업체	차수	계약금액	공사(용역)기간
**	*******	**	************	***********************
		**	***********	***********************

Ⅱ
		검토결과 및 조치계획

▢ 관련근거

〇 준공기한 연기 요청 [제2021-삼양-02(2021.08.12.)]

〇 준공기한 연기 검토 [삼양동 복합컵뮤니티 *******2(2021.08.13.)]

▢ 준공 기한 연기 검토

〇 준공기한 연기사항

구분	차수	공사기간		비고
		변경 전	변경 후
소방	1차	2020.6.19.~2021.08.30.	2021.6.19.~2021.10.15.	▸46일 연기 ▸금액변경 없음

〇 연기사유 : 선행공정(건축)지연에 따른 공사기간 연기

〇 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

〇 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 건설사업관리단 검토 의견

〇 선행공정(건축) 지연에 따른 동 공사 1차공사의 계약기간 준수가 사실상 어려워 이와 관련 준공기한 연기가 타당하다고 판단됨

▢ 조치계획

〇 검토 결과 시공사에서 요청한 준공기한 연기가 필요하여 동 계약 건에 대하여 계약부서(총무부)에 준공기한 연기 의뢰하고자 함

붙임  준공기한 연기 검토 보고, 연기 요청 공문 및 합의각서 각 1부.   끝