문서번호	설비부-12231
결재일자	2021. 8. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
허진		代윤대영	08/26 김호성
협조

『동부간선도로확장 1,3공구 전기공사』

준공기한 연장 검토보고

2021.  8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로확장 1,3공구 전기공사』

준공기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는 『동부간선도로확장 1,3공구 전기공사』관련, 준공기한 연장에 대하여 검토하고 보고드림

▸준공기한: 2021.09.02. ⇒  2022.01.10. (증 131일)

※ 공사비 증감 없음

□ 공사 개요 : 동부간선도로확장 1,3공구 전기공사

❍ 공사위치: 노원구 월계1교 ~ 의정부시계

－ 1공구: 초안산지하차도 인근 중랑천 산책로·스포츠시설 보안등

－ 3공구: 상계주공(1~3단지, 10·11단지) / 마들지하차도·수락고가차도

❍ 공사규모: 월계1교~녹천교 간(1.4km) 도로확장(4차로→6차로)

－ 1공구: 보안등 38본(LED 50W), 조명타워1EA(LED100W×3)

－ 3공구: 가로등기구 교체 144등, LED터널용등기구 229등 설치

❍ 공사기간: 2021.05.03. ~ 2021.09.02.

❍ 공 사 비: ************ (도급)

❍ 시 공 사: ㈜남경전설 (감리사: ㈜동부엔지니어링)

□ 관련근거

❍ (계약예규)공사계약일반조건 제26조(계약기간의 연장) 1항

❍ 계약기간 연장 요청 검토보고(동부간선도로 1,3공구 전기공사)

(동삼감 제2021-173, `21.08.24.)

□ 검토내용

❍ 진행현황

－ 1공구 초안산지하차도 인근 중랑천 산책로 보안등 원인자복구 완료(`21.9.)

－ 3공구 마들지하차도 터널등기구 교체 및 수락방음터널 표찰공 완료

❍ 공사 변경내용

계약번호	계약자	계약건명	계약금액(원)	준공기한
				당초	변경(연장)
**************	*****	****	***********	***********	***********

❍ 변경사유

－ 방음벽 설치구간의 선행공종인 토목공사 지연에 따른 후속공정 기간 연장

· 상계주공 1~3단지 방음시설 `21.09월 완료 예정

· 상계주공 10·11단지 방음시설 `22.01월 완료 예정

❍ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 계약금액 : 변동없음

□ 건설사업관리기술자 검토의견

❍ 선행 토목공정 공사계획 변경(순연)으로 후속 방음시설 도로조명공사 시행을 위해 계약기간을 연장하는 것이 타당함

□ 보고자 검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리기술인의 준공기한 연장 검토보고 내용이 적정하다고
판단되어 전기공사 준공기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약을 의뢰하고자 함

❍ 향후 일정

－ ‘21년 8월 : 계약변경 의뢰(준공기한 연장)

－ ‘22년 1월 : 공사 준공.  끝.