“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	주민자치과-17418		주무관	시설관리팀장		주민자치과장		행정국장
			김미옥	권현주		임동호		전결 09/03 양미영
등록일자	2021.9.2.
결재일자	2021.9.3.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		건강증진팀장		한선
					예산팀장		이채목		보건행정과장		심한석
					계약팀장		代김성하		재무과장		지영애

세곡복합문화센터 건설사업관리용역 설계변경 계획

용역명 : 세곡복합문화센터 신축공사 건설사업관리용역(감독권한대행)

❍ 용역개요

********	********		*******	****
********* ***** ******** ********	***** ******	***	*************	********** **********
	***** ******	***

❍ 계약금액 변경 및 기한 연장

***	***	***	**
***	**************	**************	***************
***	***********************	***********************	******

❍ 건축과(감독부서) 검토의견 : 적정

2021. 9.   .

	강 남 구
(		주민자치과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	․「지방계약법」제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정) ․「용역계약 일반조건」제16조(과업내용의 변경)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	․건축공사기간 연장으로 인한 건설사업관리용역 계약 변경
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	․해당없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	․해당없음
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	․해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	․해당없음

세곡복합문화센터 건설사업관리용역 설계변경 계획

「세곡복합문화센터 신축공사」 인테리어 공정 추가로 인한 계약기간 연장에 따라 건설사업관리용역을 공사기간과 맞게 연장하고 용역비용을 증액하여 세곡복합문화센터 건립에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	추진근거

용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경)

과업내용서 제2조 2.8(건설사업관리 용역대가의 조정)

건설기술용역 대가 등에 관한 기준 제7조

건설기술진흥법 시행령 제60조 및 동법 시행규칙 제35조

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장6절 (과업내용의 변경과 계약금액 조정)

세곡복합문화센터 신축공사 건설사업관리용역 계약변경 검토보고(건축과-37274,2021.08.31.호)

Ⅱ	용역개요

용역명 : 세곡복합문화센터 신축공사 건설사업관리용역(감독권한대행)

❍ 용역개요

********	********		*******	****
********* ***** ******** ********	***** ******	***	*************	********** **********
	***** ******	***

***********************

*****************************************************************************

*****************************

******************************************************************************

Ⅲ	설계변경 내용

건축공사 계약기간 연장에 따른 건설사업관리용역 변경계약

❍ 계약금액 변경 및 기한 연장

***	***	***	**
***	**************	**************	***************
***	***********************	***********************	******

❍ 공사기간후 준공검수기간 포함하여 용역기간 연장

※ 공사기간 : ’19.11.04. ~ ’21.11.15.

❍ 투입인원

***	***	***	***
****	**************	**************	***************
***	************	************	**************

검토사항

❍ 건축과(감독부서) 검토의견 : 적정

❍ 연기사유 귀책소재 : 발주청 및 불가항력의 사유

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

*	*****

*********************

*******

***************************************************************************************************

****************************************************************

**********

***************************

************************

********************************************************

(단위:원)

*****				***	*****	**** **	***
****	****	***	***				*	*
	***						**********	***********
**** *****	**********	*** ****	***	*************	*************	*************	*	***********
**** *****	**********	*** ****	***	***********	***********	***********	**********	*

※ 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 [시행 2021. 1. 1.] [훈령 제172호]

별표5. 세출예산 성질별 분류에 따른 세부집행기준

시설비(401-01-4)의 낙찰차액이 발생한 경우 원칙적으로 재사용할 수 없다.

- 다만, 동일 편성목 내의 낙찰차액을 토지매입비(보상비), 실시설계비, 부대공사비, 감리비로 사용 할 수 있다.

Ⅴ	행정사항

계약원가심사 및 설계변경 계약 의뢰  : 주민자치과

일상감사 실시 (설계변경 금액 10%이상)  :  감사담당관

계약원가심사 및 설계변경 계약 체결  :  재무과

설계변경사항에 대한 정산 및 감독 :  건축과

붙임 : 1. 세곡복합문화센터 신축공사 건설사업관리용역 계약변경 검토 알림(건축과) 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 건설사업관리용역 계약변경요청(배치계획포함)(건설사업관리단) 1부.  끝.