투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연기 의뢰(영등포로터리 구조개선사업 기본 및 실시설계 용역)

1. 토목부-18846(2021.10.8.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 진행 중인 「영등포로터리 구조개선사업 기본 및 실시설계 용역」에 대해 다음과 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 영등포로터러 구조개선사업 기본 및 실시설계 용역

- 용역규모 : 영등포고가차도 철거 및 교차로 단순 등 구조개선

· 고가차도 철거 : 폭15m, 길이425m, 교차로 개선 : 6지 →4지

- 계약기간 : ’20.12.23. ~ ’21.10.23.(총차)/’21.3.8. ~ ’21.10.23.(2차)

- 계약금액

· 총차 : 1,020,800,000원(금 십억이천팔십만원정)

· 2차 : 984,800,000원(금 구억팔천사백팔십만원정)

- 설 계 사 : (주)삼안, ㈜태조엔지니어링, 극동엔지니어링㈜, 디앤에스이앤씨(주)

나. 준공기한 연기

구분	당초 계약기간	변경 계약기간	증/감
총차	’20.12.23. ~ ’21.10.23.	’20.12.23. ~ ’22.5.31.	증) 221일
2차	’21.3.8. ~ ’21.10.23.	’21.3.8. ~ ’22.5.31.	증) 221일

※ 계약금액 변동 없음

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	홍현기		토목설계과장	한병찬		토목부장	10/12 임춘근
협조자
시행	토목부-18939	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2586	/전송	768-8905	/	hkhong80@seoul.go.kr	/	부분공개(5)