문서번호	정수과-12092
결재일자	2021. 12. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		유준수	12/01 조성태
협 조
	주무관			변민용

조달청 단가계약 지연에 따른 응집제 구매계획

2021. 11.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

조달청 단가계약 지연에 따른 응집제 구매계획

조달청 조달구매로 수급관리중인 응집제(PAC)가 조달단가 계약기간 종료 및 조달단가 재계약 지연으로 조달구매가 불가함에 따라 기존 조달계약 물량에 대해 타소보관을 통한 안정적으로 수급관리코자 함

□ 관련규정(조달청 공고 2021-18호, 2021.06.23.)

○ 「물품 다수공급자계약 특수조건 제27조(물품의 타소보관)」

- 수요기관의 불가피한 사정으로 인수가 불가능한 경우 타소보관

⇒ 이행(지급)보증보험증권 발행 및 물품규격유지확약서 제출

□ 현황

○ 약품재고 현황

구분	1정수장		2정수장
	재고량(톤)	사용일수	재고량(톤)	사용일수
PAC	625	78	166	83
PAHCS	158	15	21	7

○ 조달단가계약 현황(PAC 17%)

- 종전 계약현황

· 계약업체수 : 17개 업체(PAC17% 기준 조달단가 218,000원/톤)

· 계약기간 : 2020.11월 ~ 2021.10.30.(종료됨)

- 재계약 현황 : 조달청과 업체간 재계약 추진중

○ 조달계약 현황(암사정수장-납품업체간)

- 구매건명 : PAC 1000톤 조달구매(2021-3)

- 구매수량 및 금액 : 1,000톤 / 197,259,480원(조달수수료 포함)

- 구매방법 및 계약업체 : 조달구매(다수공급자계약 2단계경쟁) / ***

- 납품기한 : 2021.11.30.

※ 기 납품량(11.18~11.30) : 175톤(납품잔량 825톤)

□ 문제점

○ 조달단가 계약기간 종료로 인한 조달구매 불가

- 종전 계약기간 : 2020.11월 ~ 2021.10.30.

※ 응집제는 30일분 이상 재고확보를 통해 안정적으로 수돗물 생산

○ 조달청 단가 재계약 지연에 따른 2022년도 조달단가 미체결

- ***********************************************************

- *************************************************************

○ *******************************************************************************

○ ***************************************************************

- ************************************************************************

- ***********************************************************************************

□ 구매계획

○ 기존 조달납품물량(2021-3차)에 대해 물품의 타소보관을 통해 안정적 확보

- 변경내용 : 납품기한 연장(종전 ’21.11.30. ⇒ 변경 ’21.12.31.)

- 변경사유 : 납품기한내 계약수량 저장시설 부족 및 조달청 물품구매계약 불가

- 변경물량 : 450톤(PAC17%)(45일분)

※ 납품잔량 375톤 계약취소(물량변경) 처리

- 변경금액 : 88,290천원(조달단가 196,200원/톤, 조달수수료 미포함)

- 처리절차 : 수요기관이 납품기한 연장요청 후 납품업체의 승인처리

· 이행(지급)보증보험증권 발행 및 계약이행확약서 제출

※ 타소보관 : 납품업체에서 생산 납품업체의 저장탱크에 보관후 납품

- 품질검사 : 납품완료시 공인시험기관의 품질검사 성적서 발급

□ 향후계획

○ 기 납품물량 물품대금 지급 ---------------- ’21.12.15.까지

○ 납품물량변경(취소) 처리 ------------------ ’21.12.15.까지

○ 납품기한 연기물품 납품 및 품질검사의뢰---- ’21.12.17.까지

○ 납품기한 연기물품 납품완료 --------------- ’21.12.31.까지

붙임 1. 계약이행확약서 1부.

2. 이행(하자)보증보험증권 1부.

3. 물품보관증 1부. 끝.