문서번호	정수시설과-6642
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		代서기석	12/02 김훤기
협 조

2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

『2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)』1차수 시행 중 신규공종 발생 및 물량 증·감 등 변경사항에 대한 설계변경 심의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 정수시설과-6592(2021.12.1.)호『2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비  보수공사(연간단가)』설계변경 심의위원회 개최

□ 심의개요

○ 심의일시: 2021년 12월 2일(목) 15:00~16:30

○ 심의장소: 뚝도아리수정수센터 정수시설과

○ 위원구성

- 위원장: *************

- 위  원: **********************************

□ 심의내용

○ 설계변경 타당성 및 변경 계약금액 적정성 여부

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감(원)
총부기금액	**********	**********	-
1차수계약금액	**********	**********	-

○ 신규공종 발생 수량 단가의 낙찰률 적용 여부

○ 수량 변동 및 단가 적용의 적정성 여부

○ 제경비 요율 적정 산정 및 적용 적정성 여부

○ 각종 제반 규정 준수여부 및 관련규정의 불명확한 내용 유무 확인 등

□ 심의결과

○ 설계변경의 타당성: 타당함

○ 단가 산출 적정여부: 적정함

○ 제경비 요율 적정 산정 및 적용 적정성: 적정함

○ 각종 제반 규정 준수여부: 특이사항 없음

○ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토: 특이사항 없음

□ 행정사항

○ 상기 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 행정관리과에 변경계약 의뢰

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 심의 의견서 1부.  끝.