문서번호	정수시설과-6885
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최재호		유통희	12/14 김훤기
협 조
	주무관			배용우

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

(2021년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가))

2021. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

(2021년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가))

우리 정수센터에서 시행중인「2021년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)」건의 물량 증감 등 변경사항에 대한 설계변경 심의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련문서

○ 설계변경 심의위원회 개최 보고(2021년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가))

- 정수시설과-6863(2021.12.13.)호

□ 심의개요

○ 심의일시 : 2021. 12. 13. 16:00 ~ 17:00

○ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

○ 위원구성

************************

***************************************************

□ 심의내용

- 설계변경의 타당성 및 변경 계약금액 적정성 여부

- 단가 산출 및 내역서 계산식 적정 여부

- 제경비 요율 산정 및 적용의 적정 여부

- 각종 제반 규정 준수 여부

- 기타 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토

□ 심의결과

○ 설계변경의 타당성 : 타당

○ 단가 산출 및 내역서 계산식 적정 여부 : 적정

○ 제경비 요율 산정 및 적용의 적정 여부 : 부적정

- 심사 후 변경내역

(단위 : 원)

구분	심사 전 변경금액	심사 후 변경금액	증 / 감
이 윤	*********	*********	***	*******
공급가액	**********	**********	***	*******
부가기치세	*********	*********	***	******
합 계	**********	**********	***	*******

○ 각종 제반 규정 준수 여부 : 특이사항 없음

○ 기타 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 특이사항 없음

□ 행정사항

○ 설계변경 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 계약의뢰.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.
2. 설계변경 사유서 1부.
3. 설계변경 심의 의견서 1부.
4. 계약금액 조정검증 내역서 1부.  끝.