“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	문화체육과-36101		주무관	체육시설팀장		문화체육과장		뉴디자인국장
			임종운	이상철		김하성		전결 12/27 김희주
등록일자	2021.12.27.
결재일자	2021.12.27.
공개구분	대시민공개
			협조자

포이초등학교 체육시설 설치 사고이월 계획

□ 공사내역

구 분	포이초등학교	비고
위 치	개포로22길 87
설치시설	천연잔디구장 1면, 육상트랙 1면
공사기간	2021. 11. 10 ~ 2022. 6. 30

□ 사고이월 사유

- 겨울철 토사 동결로 천연잔디 식재 시기를 변경하는 등

현장여건에 맞는 공정의 추가 및 변경으로 회계연도 내

지출이 불가하여 사고이월하고자 함

□ 사고이월 금액(예정)

(단위 : 원)

구분	계약금액	지출원인 행위액	지출액	사고이월액	집행잔액
설치공사	565,301,000	565,301,000	282,111,000	283,190,000	0
관급자재	123,306,680	123,306,680	35,894,190	87,412,490	0
감리용역	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
합계	693,607,680	693,607,680	318,005,190	375,602,490	0

	강 남 구
(		문화체육과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 - 지방재정법 제 50조 및 시행령 제58조(세출예산의 이월)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 포이초등학교 체육시설 설치 추진
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 - 지방재정법 제 50조 및 시행령 제58조(세출예산의 이월)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 학생 및 일반주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( √ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당 없음

포이초등학교 체육시설 설치 사고이월 계획

2021년 본예산으로 진행중인 「포이초등학교 체육시설 설치사업」에 대하여   아래와 같이 사고이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 지방재정법 제50조 및 동법시행령 제58조(세출예산의 이월)

□ 강남구 재무회계규칙 제27조(이월예산의 집행)

Ⅱ		사고이월 사업 개요

□ 사업명 : 포이초등학교 체육시설 설치

❍ 추진대상 : 포이초등학교 운동장 내

구 분	포이초등학교	비고
위 치	개포로22길 87
설치시설	천연잔디구장 1면, 육상트랙 1면
공사기간	2021. 11. 10 ~ 2022. 6. 30

❍ 추진현황

- 2021.09.13. : 포이초, 역삼중 체육시설 설치 계획 수립

- 2021.10.14. : 관급자재 구매 계약

- 2021.11.02. : 설치공사 계약

- 2021.11.09. : 전기공사 계약

- 2021.11.09. : 감리용역 계약

- 2021.12.21. : 설치공사 변경계약

- 2021.12.21. : 감리용역 변경계약

- 2021.12.21. : 관급자재(플라스틱바닥재) 납품기한 변경

❍ 사고이월(예정)금액

(단위:원)

구분	계약금액	지출원인행위액	지출액	사고이월액	집행잔액
설치공사	565,301,000	565,301,000	282,111,000	283,190,000	0
관급자재	123,306,680	123,306,680	35,894,190	87,412,490	0
감리용역	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
합계	693,607,680	693,607,680	318,005,190	375,602,490	0

Ⅲ		세부 사고이월 내역

설치 공사

❍ 사업기간 : 2021. 11. 10 ~ 2022. 6. 30

❍ 사 업 비 : 금565,301,000원

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

❍ 예산과목 : 문화체육과, 생활체육 활성화, 체육시설 인프라 구축, 강남구 내 체육시설 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 사고이월 사유

- 겨울철 토사 동결로 천연잔디 식재 시기를 변경하는 등 현장여건에 맞는 공정의 추가 및 변경으로 회계연도 내 지출이 불가하여 사고이월하고자 함

❍ 사고이월 금액(예정)

(단위:원)

구분	계약금액	지출 원인행위액	지출액	사고이월액	집행잔액
포이초등학교 체육시설 설치공사	565,301,000	565,301,000	282,111,000	283,190,000	0

관급자재 구매

❍ 사업기간 : 2021. 10. 5 ~ 2022. 3. 31

❍ 사 업 비 : 금87,412,490원

❍ 계약방법 : 조달구매

❍ 예산과목 : 문화체육과, 생활체육 활성화, 체육시설 인프라 구축, 강남구 내 체육시설 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 사고이월 사유

- 겨울철 토사 동결로 천연잔디 식재 시기를 변경하는 등 현장여건에 맞는 공정의 추가 및 변경으로 일부 품목의 회계연도 내 지출이 불가하여 사고이월하고자 함

❍ 사고이월 금액(예정)

(단위:원)

구분	계약금액	지출 원인행위액	지출액	사고이월액	집행잔액
포이초등학교 체육시설 설치 관급자재 구매	123,306,680	123,306,680	35,894,190	87,412,490	0

감리 용역

❍ 사업기간 : 2021. 11. 10 ~ 2022. 6. 30

❍ 사 업 비 : 금5,000,000원

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 예산과목 : 문화체육과, 생활체육 활성화, 체육시설 인프라 구축, 강남구 내 체육시설 설치, 시설비 및 부대비, 감리비

❍ 사고이월 사유

- 겨울철 토사 동결로 천연잔디 식재 시기를 변경하는 등 현장여건에 맞는 공정의 추가 및 변경으로 회계연도 내 지출이 불가하여 사고이월하고자 함

❍ 사고이월 금액(예정)

(단위:원)

구분	계약금액	지출 원인행위액	지출액	사고이월액	집행잔액
포이초등학교 체육시설 설치공사 감리용역	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0

Ⅳ		향후계획

□ 2022. 4월 ~ 7월 예산집행 및 지출완료.  끝.