문서번호	토목부-25076
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이성열	代전병철	12/21 김용제

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역』

통합건설사업관리용역 설계변경(2차 3회) 검토보고

2020.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역』

통합건설사업관리용역 설계변경(2차 3회) 검토보고

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역의 설계변경 요청에 대한 검토보고임.

Ⅰ		추진근거

□ 용역계약 일반조건 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

□ 건설사업관리용역(2차분 3회) 변경요청(경동 제2020-3168호, ’20.12.21.)

Ⅱ		용역개요

□ 용 역 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역

□ 용역기간: ***************************************************

□ 용 역 비: **************************

□ 계 약 자: **************

Ⅲ		주요보고 내용

□ ’20년 회계연도 마감에 따른 건설사업관리기술자 투입인원 조정 :

당초) 2021.01.31. → 변경) 2020.12.31.

◦ 책임건설사업관리기술자(토목) 13.0개월 → 12.0개월(감 1개월)

◦ 토목 분야별사업관리기술자 10.45개월 → 8.67개월(감 1.29개월)

◦ 고덕교 휴일 근무 수당 3.56개월 → 1.0개월(감 2.56개월)

Ⅳ		설계변경 내역

□ 전체 투입인원 변경 현황(변경없음)

***		**	***		***		**** *********	**
			**	**	**	**
** *** ***	******	**	*****	*****	*****	*****	***	****
	******	**	*****	****	*****	****	***	***
	******	**	*****	*****	*****	*****	***	***
	******	**	****	****	****	****	***	***
	******	**	*****	*****	*****	*****	***	*******
	******	**	****	****	****	****	***	***
	******	**	****	****	****	****	***	***
	*			*****		*****	***
	****			*****		*****	***
	*****			*****		*****	***
	******	**	****	****	****	****	***	*** **********

□ 2차 투입인원 변경 현황(2차 3회)

***		**	***		***		**** ***********	**
			**	**	**	**
** ****	******	**	*****	*****	*****	*****	*****	****
	******	**	*****	****	*****	****	*****	***
	******	**	*****	****	*****	****	*	***
	******	**	****	****	****	****	*	***
	******	**	*****	*****	*****	*****	*	*******
	******	**	****	****	****	****	*****	***
	******	**	****	****	****	****	*	***
	*			*****		*****	*****
	****			****		****	*****
	****			*****		*****	*****
	******	**	****	****	****	****	*****	*** **********

□ 용역비 변경 현황

(단위 : 원)

****		***	***	*********
** ******	********	*************	*************	*
	*****	***********	***********	*
	*******	*************	*************	*
** ****	********	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	**********
	*******	***********	***********	***********

□ 용역기간 변경 현황(변경없음)

****	***	***	***
**	***************************	***************************	****
**	**************************	**************************	****

Ⅴ		조 치 의 견

□ 상기와 같이 『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역』에 대해 설계변경을 시행하여 건설사업관리용역 수행에 차질이 없도록 조치하고자 함.

*************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************

따로붙임  1. 설계변경내역서(2차 3회)

2. 건설사업관리용역 설계변경 승인요청 공문 1부.  끝.