문서번호	동남권사업과-3742
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공공사업팀장	동남권사업과장		지역발전본부장
김동석	소영수	김성기		04/26 김상한
협 조	주무관		박수연
	주무관		안현우

- 잠실주경기장 리모델링(학생체육관 이전·신축 포함) -

설계용역 기본설계 완료보고

2021. 4.

지역발전본부

(동남권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 잠실종합운동장 주경기장 리모델링(학생체육관 이전·신축 포함) -

설계용역 기본설계 완료보고

Ⅰ		용역개요

○ 사업위치 : 송파구 올림픽로 25일대 (잠실종합운동장 내)

○ 사업면적 : 156,572㎡ (기존영역 140,175㎡+하천 확장영역 16,397㎡)

○ 사업규모 : 지하4층/지상3층, 연면적 228,863㎡ [(기존) 연면적 241,701㎡]

- 주경기장(리모델링): 116,656㎡ (공인1종 육상경기장, 7만석→6만석, 원형보전)

- 보조경기장(이전신축): 713㎡ (관람석 1,912석)

- 데크시설(증축)    : 86,853㎡ (업무, 판매, 운동시설, 지하주차장 등)

- 학생체육관(이전신축): 24,641㎡ (실내체육관, 수영장, 다목적실 등)

***************************************************************

○ 설 계 자 : ㈜나우동인건축사사무소 외 2 (삼우종합건축사사무소, NBBJ)

○ 용역기간 : 2020. 1. 15. ~ 2022. 1. 14.(24개월)

○ 계약금액 : 14,400백만원 (전액 공공기여)

○ 사 업 비 : 3,500억원 (공사비 3,126억원 + 통합발주비 374억원)

※ 통합발주 내역(학생체육관 포함) : 설계비 144억원, 감리비 174억, 기타비 56억

Ⅱ		추진경위

○ '17. 7. 「올림픽 주경기장 리모델링 기본계획」수립

○ '18. 5.  주경기장 리모델링 국제설계공모 당선작 선정 (나우동인 외 2개사)

○ '18.12. 「잠실 학생체육관 이전 신축 기본계획」수립

- 시-교육청 TF 운영 및 실무협의 결과 기본계획 합의안 도출

○ '20. 1.  주경기장 리모델링 기본 및 실시설계 용역 착수 (착수보고 2.12.)

- 계획적 연계성이 높은 ‘학생체육관’과 통합 설계 시행

○ '20. 8.  주경기장 리모델링 설계 용역 계획설계 완료

○ '20. 9.  주경기장 리모델링 주요시설 배치계획 조정

- 공인1급 통합수영장(학생체육관+민자수영장) 반영, 유스호스텔 삭제 검토

Ⅲ		기본설계 검토

□ 과업내용 검토

○ 주경기장 리모델링 및 학생체육관 이전·배치, 보조경기장 등 과업내용의 주요시설 배치를 반영 하였음.

○ 통합수영장 추진계획에 따라 건축계획 및 민자사업과의 정합성 확보를 위한 설계검토가 반영됨.

○ 사업계획 변경사항 반영

- (통합수영장) 공인1급 수영장 시설 반영(민자수영장 포함)

**************************************************************************************

- (운영부서) 체육정책과, 체육시설관리사업소, 문화예술과, 송파소방서 등 유관부서(기관)와 협의를 통하여 요청사항 반영 (추가 요청시 지속적으로 보완 예정)

- (구역계 조정) 지구단위계획의 도시계획시설(체육시설, 하천)과 민자사업구역의 변동 사항을 반영하여 공공사업부지 확정

**************************************

**********************************************************************************

□ 주경기장 리모델링 주요 공사 내용

○ (주경기장) 전체 동선개선(열림마당, 울림광장, 서비스링, 외부데크시설 및 계단 철거 후 신설 등), 외벽오픈 및 도장, 관람석 교체, VIP실 개선, 공인1급 국제규격 완성

○ (학생체육관) 체육관 이전, 민자수영장과 연결하는 통합1급 수영장 건립

○ (프로그램 배치) 직장운동경기부 훈련장, 생활체육시설, 업무시설, 판매시설, 장애인창작스튜디오, 119안전센터 등 배치

○ (주변 정합성) 민자사업과 연계하는 지상공원화 및 보행, 주차 동선 연결 확보

*******************************

***************************

*********************************************************************************

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

○ 업무분장 계획에 따라 실시설계 업무는 도시기반시설본부 소관사항으로 원할한 사업추진을 위해 실시설계 수행을 의뢰 하고자 함.

○ 향후 일정

- 2021. 4.    실시설계용역 자문회의(12차) 등 실시설계 추진

- 2021. 5.    교통영향평가 사전자문 등 인허가 절차 진행 예정

- 2022. 1.    주경기장 리모델링 설계용역 완료 예정

붙임  공사비대안 보고자료 제출 건 1부(설계자 공문).  끝.