투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시난지물재생센터소장 (시설보수과장)
(경유)
제목	난지물재생센터 총인처리시설 전력공급지점 변경 협의

1. 난지물재생센터 총인처리시설 설치사업 관련 총인처리시설 전력공급지점 변경에 대한 검토의견서가 건설사업관리단으로부터 접수되어 귀 센터에 아래와 같이 업무 협의하오니 검토 후 그 결과를 우리 본부로 2022. 4. 8.(금)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 협의내용

○ 기존 계획된 주전기실 변압기 3,4호기 4,000kVA를 5,000kVA로 2대 교체 시 ’17년 대비 전력사용량 증가로 계획변경이 필요함, 변경 1안), 2안)중 운영주체 의견조회

○ 전력공급 변경(안)

구분	1안) 계통변경(6.6kv→ 22.9kv)	2안) 주전기실 변압기 교체(6,500kva 2대)
장점	****************************** *********************** ************** *********************	********************
단점	********************	********************** ************************************

○ 건설사업관리단 의견 : 1안)이 적정함

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이창근		설비총괄과장	장병선		설비부장	04/01
김호성
협조자
시행	설비부-20600	(	2022.04.01	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	zoom4799@seoul.go.kr	/	부분공개(5)