문서번호	공원운영과-20730
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
원장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
양근대	류기혁	04/04
		이용남
협 조
	시설과장		代고봉채
	녹지조경팀장		김영미

서서울호수공원 감시장비 정비 및 보완 계획

2022. 4.

공원운영과

(서서울호수공원)

서서울호수공원 감시장비 정비 및 보완 계획

서서울호수공원 호수 감시장비(CCTV) 정비 및 시설 보완을 통해 안전사고 발생을 미연에 방지하고자 함.

추진 배경

□ '22.2.19.(토) 03:54 경 공원 내 연못에서 익사 사고 발생으로 감시 기능 강화 필요성 제기

감시장비(CCTV) 현황 및 문제점

□ 감시카메라: 37대(4개 회선 고장)

- 저장장치: 29.04Tb (3.63Tb×8대), *저장일수: 약 15일

※ 순차 저장 후 용량 초과 시 과거 자료 자동 삭제 저장

- 운영: 관리사무실 내 감시모니터(4대) 운영

□ 문제점: 감시용 모니터가 관리사무실에만 설치되어 근무자가 없는 취약시간대 활용 불가

개선방안

□ (감시기능 확대) 상시 근무자가 있는 초소 내로 모니터 장비 추가 설치

- 설치장소: 정문 초소 (벽걸이 또는 스텐드형 1~2대, * 공간 고려 설치시 수량 확정)

□ (감시장비 정상화) 전문업체를 통한 일체 점검 후 문제점 발견 시 즉시 수리 시행

부서(시설과) 협조사항

□ 고장 회선 점검·정비 및 시설 보완 공사 시행

- (고장회선 정비) 정문, 정문 자전거 거치대 근처, 야구장 앞, 능골산 이동화장실(삼거리)

- (시설보완) 정문 초소 내 감시용 CCTV(37회선) 모니터 추가 설치

※ 모니터 장비 설치 시 가용면적 고려

추진일정

□ ’22.4. 4.~4. 15.	: 현장조사 및 설계

□ ’22.4.18.~4. 26.	: 정비사업 시행

□ ’22.4.27.~4. 30.	: 장비 운영교육 및 시범운영

□ ’22.5.1.	: 정상 운영 개시

소요예산: 약40,000천원

□ 소요예산 확보: 소요예산은 旣 확보된 산하공원 시설비 및 부대비 집행잔액을 우선활용

□ 예산과목: 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비. 끝.