등록번호

기후환경과-11426

주무관

맑은대기팀장

기후환경과장

환경생활국장

부구청장

구청장

등록일자

2022.4.13

이윤주

김명애

석도현

박우석

김진만

04/13

문석진

결재일자

2022.4.13.

공개구분

비공개

협  조

교통관리과장

유병선

주차관리팀장

유선환

토목과장

강우균

토목팀장

양규철

안전치수과장

시희식

치수팀장

서재영

재무과장

기민희

일자리경제과장

박춘식

계약팀장

문혜선

일자리정책팀장

강윤진

2022년 공영주차장 전기차 충전소 설치 계획

서 대 문 구

기후환경과

사전 검토 항목
☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목		검토 여부 ( ■표시 )
구민참여 등 고려여부	구민	유 □ ☞ 방법( )		해당무 □
	협치파트너	유 □ ☞ 방법( )		해당무 □
	이해당사자	유 □ ☞ 방법( )		해당무 □
	전문가	유 □ ☞ 방법( )		해당무 □
	기타	유 □ ☞ 방법( )		해당무 □
관계기관 및 부서협의	관계기관·단체	유 ■ ☞ 기관명(서대문도시관리공단)		해당무 □
	관련부서	유 ■ ☞ 부서명(교통관리과)		해당무 □
관련법령	법령규정	검토 ■ ☞ 법령명(환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률)		해당무 □
	공직선거법	검토 □ ☞ 저촉여부( )		해당무 □
	조례 및 규칙	검토 □ ☞ 조례규칙명( )		해당무 □
재원확보 및 처리절차	예산확보	구비 ■ 시비 ■ 국비 □ 기타 □ ( )		해당무 □
	처리절차	투자심사 □ 용역심사 ■ 심의 □ 기타 □		해당무 □
갈등관리	해소방안	대책마련 □ 이해조정 □		해당무 □
홍보	홍보수단	보도자료 □ 소식지 □ SNS □ IPTV □ 기타 □ ( )		해당무 □
기타 고려사항	기타	고용효과 □ 성인지 □ 장애인 □ 노인 □ 아동 □ 한부모가정 □ 안전 □ 유지관리비용 □ 기타 □ ( )		해당무 □
바른 우리말	행정순화어	불필요한 외국어·외래어 사용여부		검토완료 □

2022년 공영주차장 전기차 충전소 설치 계획

전기차의 수요 증가와 관련 법령 개정에 따라 공영주차장에 전기차 충전 인프라를 확충하여 전기차 보급을 촉진하고 구민들의 이용 편의에 기여하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 『환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령』제18조의6(2022.1.28.시행)

- 주차면 50면이상 공영주차장은 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역의 설치 의무화(총 주차면 5% 의무설치)

□ 전기차 충전시설 확충을 위한 특별조정교부금 교부

(서울시 기후변화대응과-1511, 2021.11.19.)

Ⅱ		공영주차장 현황

□ 시설현황

연 번	공영주차장 명	주차 면수	의무설치 면수	기 설치면수	소재지	비 고
	계	997	49	5
1	북성초등학교 공영주차장	105	5	0	북아현로1나길22
2	홍은1동 제4공영주차장	105	5	1	홍은동 1-24
3	남가좌2동 제2공영주차장	95	5	1	남가좌동 3-76
4	홍연초등학교 공영주차장	86	4	0	백련사길 39
5	홍은1동 제1공영주차장	76	4	0	포방터2길 10
6	남가좌2동 제1공영주차장	71	4	0	남가좌동 64-8
7	충현동 제1공영주차장	63	3	1	경기대로 72
8	창업지원센터 부설주차장	56	3	2	통일로 483	일자리경제과 협조
9	홍은2동 제3공영주차장	54	3	0	연희로39길 12
10	서대문구청 제2부설주차장	55	3	0	연희로 370	수변카폐조성,주차면 50미만 예정
11	독립문 문화공원 지하 공영주차장	120	4	0	영천동 263	`23. 준공 예정
12	연희동 제5공영주차장	61	3	0	연희동 522-2	재개발구역
13	북아현동 제2공영주차장	50	3	0	북아현동 121-1

※ 의무설치 대상 49면중 31면 설치 : 재개발 및 주차면수 감소 13면, 기설치 5면 제외

Ⅲ		설 치 개 요

□ 50면이상 공영주차장 전기차 충전소 설치

○ 추진기간 : 2022. 4월 ~ 12월

○ 소요예산 ***************************************

○ 설치규모 : ***********************

※ 예산상황을 고려하여 추가 설치 및 위치 변경 가능

○ 설치위치

홍은1동 제4공영주차장	창업지원센터 부설주차장	북성초등학교 공영주차장	홍연초등학교 공영주차장	홍은2동 제3공영주차장

충현동 제1공영주차장	남가좌2동 제2공영주차장	홍은1동 제1공영주차장	남가좌2동 제1공영주차장

Ⅳ		세부 추진계획

□ 공사계획 일정(안)

설계용역 계약 및 설계	⇨	공사 일상감사 및 계약심사	⇨	전기공사 입찰공고	⇨	공사완료	⇨	서울에너지공사 운영관리 위탁
4월		5월		5월		6월~12월		6월 ~ 12월

※ 공사완료 시 순차적 운영관리 위탁 실시

□ 공사계획(안) 설계용역 계약

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

○ 소요예산 : ***************

○ 설계대상 : 9개 공영주차장 등(예산범위에서 추가 설계 가능)

○ 설계내용 : **************************

○ 과업기간 : **************************

□ 공사계획(안) 충전기 구매 및 설치 공사

○ 계약방법 : 공개경쟁입찰

○ 소요예산 : 설계용역 결과로 산출

○ 구매내용 : 급속(듀얼100kw) 15기(30면) ※ 장소여건에 맞는 모델결정

○ 물품사양

- 충전정보시스템(ev.or.kr)에 위치, 상태 정보 등 연동 가능

- 서울에너지공사 위탁운영 연동 가능

○ 공사방법 : 설계용역으로 도출된 공사 규모를 토대로 결정

- 한전 모자 분리(계량기 추가설치) 및 분전반 설치

- 전기차 충전구역 도색, 캐노피(야외) 및 카스토퍼 설치 등

○ 충전기 이격거리 및 주차면 도색 기준(급속 스탠다드형)

충전기 설치 이격거리 도면	주차면 도색기준

□ 설치 충전기 운영 관리 위탁 협약

○ 위탁기관 : 서울에너지공사

○ 위탁기간 : 5년(재연장 가능)

○ 위탁내용

- 전기차 충전기 유지보수(수시·정기 점검 실시)

- 민원응대서비스(콜센터) 운영 등

Ⅴ		소 요 예 산

□ 예 산 : 800,000천원(시특별조정보조금 500,000천원/구비 300,000천원)

(단위:천원/vat포함)

연 번	구 분	품 명	규 격	수 량	단 위	추정단가	추정가격
1	설계	설계용역		1	식	20,000	20,000
2	물품	(급속)충전기	100kw	15	대	25,000	375,000
3	공사	전기공사*		15	식	14,000	210,000
		한전불입금	표준시설부담금	15	식	10,500	157,500
4	감리	감리용역			식		37,500
총 계							800,000

* 전기공사 단가는 설치 장소에 따라 차이 발생하여 평균단가로 산정

Ⅵ		향 후 계 획

□ 충전기 설치 공사 설계용역 계약 : 2022. 4월

□ 물품구매 및 전기공사 공개경쟁입찰 : 2022. 5월

□ 전기공사 실시 : 2022. 6월 ~ 11월

□ 서울에너지공사와 충전기 관리 위탁 협약 체결 : 2022. 6월 ~ 12월

Ⅶ		행 정 사 항

□ 공영주차장 전기차 충전시설 의무설치 및 상시개방을 위한 기반시설 설치 요청       : 교통관리과, 서대문도시관리공단

□ 전기차충전소 설치 장소 제공 : 일자리경제과, 안전치수과, 토목과

□ 설계 수의계약 및 공사 입찰 공고 : 재무과

□ 충전소 추가 설치 장소 발굴 등 : 서대문도시관리공단