문서번호	배수과-21414
결재일자	2022. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
이진영	김근용	신용철		05/17
				김권기
협 조	누수대응과장		代김영혁
	시설건설과장		이승우

『장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시설계』

중간보고회 개최 계획

2022. 5.

상수도사업본부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시설계』

중간보고회 개최 계획

『장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시설계』에 대한 중간 보고회 개최 계획을 보고 드림.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 계약현황

○ 과 업 명 : 장기사용 대형 송·배수관 정비공사 기본 및 실시 설계용역

○ 기    간 : '21. 4. 16. ~ '22. 12. 6.

○ 도 급 비 : 1,517백만원

○ 용 역 사 : ㈜유신외 3개사

○ 과업대상 : (17개 구간) ’70~’82년, 강관, D900~2,000㎜, L=34㎞

구 분	계	중부	동부	북부	남부	강남	강동
규모(㎞)	34(5)	9.8	6.6(2)	2.7	3.6(2)	6.8(1)	4.5
구간(개소)	17(3)	5	4(1)	1	1(1)	3(1)	3

※ ( ) : 우선발주 구간 3건(’79~’82년, D900~D1,650㎜, L=5㎞) 완료 포함

□ 추진경과

○ 장기사용 대형 송배수관 설계 용역 방침 수립	’20. 12. 23.

○ 용역발주	’21. 3. 9.

○ 용역착수	’21. 4. 16.

○ 착수 보고회 개최	’21. 6. 10.

- **************************************** 등

○ 우선발주 구간 설계(공사방안 검토, 공법선정 등)	’21. 6.~11월

○ 현장조사, 개량공법 및 구간별 공사방안 검토	'21. 12.~'22. 5월

- 기본계획 검토, 간접평가, 수리검토를 통한 관경 검토, 노선 검토, 시설물 현황 조사, 공사방안 검토 등

Ⅱ		보고회 계획

□ 개최개요

○ 일    시 : ’22. 5. 24.(화) 14:00

○ 장    소 : 4층 대회의실

○ 참 석 자

- (본  부) 부본부장, 급수부장, 배수과장, 누수대응과장, 시설건설과장

- (사업소) 급수운영과장(중부, 강남, 강동)

- (용역사) 사업책임기술자, 분야별 책임기술자

○ 내    용

- 밸브 및 관로 상태, 시설물 위치 등 현황조사 결과

- 부식 전경, 내·외부 하중 등 간접평가 결과

- 정비 대상 관로의 유량, 수압, 장래 공급량 등 수리검토에 따른 경제적 관경

- 구간별 공사 방안 검토 결과 등

□ 진행순서

시 간		내 용	비 고
14:00 (5′)		회의개요 및 참석자 소개	배수과장
14:05 (30′)		과업보고
	(5′)	과업개요	사업책임기술자
	(20′)	과업수행 경과 보고
	(5′)	향후 추진 계획
14:35 (20′)		기타 질의 답변 및 논의	참석자
14:55 (5′)		총 평	부본부장
15:00 (-)		회의종료

Ⅲ		향 후 계 획

○ 설계도면 작성 및 검토회의	’22. 5월

○ 관체 직접조사(내외면 조사, 시험편 채취 평가)	’22. 6월

○ 공법 선정 심사위원회 개최	’22. 7월

○ 설계도서 등 준공성과품 작성	’22. 9월

○ 설계VE, 기술심의	’22.10월

○ 최종 보고회 개최 및 준공	’22.12월

붙임 : 과업대상 구간별 현황 1부.  끝.