문서번호	시설관리과-24419
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장승화		김대용	05/18
			이태형
협조

장평초등학교 주변 외 1개소 장기사용 배급수관 정비공사 단수계획 보고

동부수도사업소

시설관리과

단수 작업 계획

장평초등학교 주변 외 1개소 장기사용 배급수관 정비하는 공사로서 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질 없이 시행하기 위하여 단수계획을 수립 시행하고자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 장평초등학교 주변 외 1개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 시 공 사: **********************

○ 감 독 청: *****************

○ 공사위치: ***********************

○ 공사개요: D=200mm 분기 9개소 및 노후관 정비공사, L=260m

○ 공사기간: 2022.05.23 ~ 06.08

□ 단수작업계획

○ 단수일시: 2022.05.23 ~ 06.08 09:30 ~ 17:00사이 (5시간)

○ 단수지역: *************************

○ 단수사유: 장기사용 배급수관(1985/DCIP) 개량공사 시행에 따른 단수

○ 위치 및 현황 사진도

위치도

○ 공정별 단수작업 세부계획

작업계획	소요시간	비고(산출근거)
제수밸브 개폐	30분	**********
퇴 수	30분	*****************
기존관 절단	40분	**************
배 관	200분	******
세척 및 통수	60분
합 계	300분(5시간)

○ 홍보계획

- 상수도 홈페이지(GIS)를 통한 인터넷 홍보

- 단수지역내 단수안내문 부착

- 단수시 가두방송을 통한 현장 안내

□ 검토 및 조치 의견

○ 단수작업 계획에 따른 검토결과 반드시 단수가 수반되는 공사이므로, 단수시간(5시간) 내에 작업이 완료될 수 있도록 시공업체 및 감리감독자에게 통보코자 하며 통수후에도 수질관련 민원발생이 최소화되도록 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 1. 단수계획서 및 홍보문 1부.

2. 단수 • 통수 및 수계전환 업무지침 1부. 끝.