문서번호	자연생태과-27785
결재일자	2022. 7. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태복원팀장	자연생태과장
윤희권		이흥규	07/26
			김대성
협조

2021년 하천생태 복원 및 녹화사업 추진결과 보고

2022. 7.

푸른도시국

(자연생태과)

2021년 하천생태 복원 및 녹화사업 추진결과 보고

2021년 도심 하천변 나지화된 공간 등에 기존 식생과 연계한 군락형 숲 조성 및 사면녹화 등으로 경관개선과 하천생태 건강성을 회복코자 실시한 하천생태 복원 및 녹화사업의 추진 결과를 보고함

1		사업개요

❍ 대상지 : 성동구 청계천 등 11개 하천, 32개소

❍ 총 사업비 : 16,398백만원(시설비 16,395백만원, 시설부대비 3백만원)

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6.

❍ 사업내용 : 하천변 식재기반 조성 및 제방사면 녹화 등

※ 추진실적 (’06~’21)

구 분	계	’06~’17	’18	’19	’20	’21
개소	225	125	17	23	28	32
면적(㎡)	2,875,828	1,932,678	128,650	329,240	281,910	203,350
예산액 (백만원)	112,320	61,628	7,000	12,532	14,762	16,398

안양천(양천구)	중랑천(노원구)	묵동천(중랑구)

2		추진결과

❍ 성동구 중랑천 등 32개소 준공

- 2021년 준공 : 성동구 중랑천 등 29개소

- 2022년 준공 : 성동구 청계천 등 3개소 (사고이월)

자치구	하천명	사 업 구 간	면적 (㎡)	사업비 (백만원)	공사기간	비고
		계	203,350	16,398
성동	청계천	사근램프~ 중랑천 합류부	1,000	1,080	'21.10.26~'22. 4.30.	사고이월
성동	중랑천	송정빗물펌프장~햇살어린이집 (송정제방)	2,000	500	'21. 8.23.~‘21.12.10.
광진	중랑천	군자교~장평교	5,000	295	‘21. 9. 6.~21.12. 4.
동대문	정릉천 성북천	정릉천(정릉천교~종암대교) 성북천(성북천교~안암2교)	15,750	800	'21. 6.25.~‘21. 8.20.
동대문	중랑천	장평교~성북구 경계	7,000	850	'21. 6.21.~‘21.10.20.
동대문	중랑천	중랑교~이화교	1,000	1,000	'21. 6.22.~‘21. 8.20.
동대문	중랑천	이화교~성북구 경계	3,000	300	'21.10. 6.~‘21.12. 4.
동대문	중랑천	군자교~중랑교	6,000	600	'21.11.30.~‘21.12.27.	추경
중랑	중랑천	구 묵동교~장평교	2,000	500	'21. 8.30.~‘21.12.10.
성북	정릉천	정릉천 하류 (월곡역사거리~국방연구원 앞)	1,600	750	'21. 9.27.~‘21.12.20.
성북	성북천	한성대입구역~안암2교 (삼선동4가 104-3번지 일대)	6,500	200	'21. 9.10.~‘21.11. 8.
성북	중랑천	석계교~석계초등학교 앞 (석관동 400번지 일대)	4,000	300	'21. 6.10.~‘21.10.20.
노원	중랑천	한내교~월릉교(우안)	10,000	400	'21. 8.19.~‘21.11.12.
노원	묵동천	두물머리교~중랑천합류부	26,000	1,000	'21. 8.31.~‘21.12.20.
노원	중랑천	한천교~월릉교	1,000	100	'21.10.27.~‘21.12.13.	추경
은평	불광천	응암교~증산교	21,000	1,000	‘21.12. 6.~'22.6. 3.	사고이월
마포	향동천	덕은1교~구룡사거리	9,000	800	'21. 9.15.~‘21.12.10.
양천	안양천	고척교~오금교 1 (신정동 871-2 번지 일대)	10,000	200	'21. 9.27.~‘21.11.25.
양천	안양천	고척교~오금교 2 (신정동 871-2 번지 일대)	1,000	100	'21. 9.27.~‘21.11.25.
양천	안양천	오금교 부근	1,000	100	'21.12. 1.~‘21.12.20.	추경
구로	안양천	안양교~광명대교 1 (구로동 681-23번지 일대)	4,000	1,000	'21. 5. 7.~‘21. 7. 5.
구로	안양천	안양교~광명대교 2	2,000	200	'21. 9.24.~‘21.10. 8.	추경
금천	안양천	시흥대교 주변	2,000	200	'21. 7.21.~‘21.11.20.
금천	안양천	안양천교~금천교	3,200	320	'21.11.23.~‘21.12.10.	추경
영등포	도림천	구로디지털단지역~신도림역	4,800	500	'21. 8. 3.~‘21.10.15.
영등포	안양천	목동교~양평교	10,000	800	'21. 9.23.~‘21.12.21.
영등포	안양천	양평교~한강 합수부	5,000	1,000	'21. 9.23.~‘21.12.21.
영등포	안양천	신정교~오금교(축구장 철거)	4,000	400	'21.11. 9.~‘21.12.15.	추경
영등포	안양천	신정교~오금교	1,000	100	'21.11. 9.~‘21.12.15.	추경
송파	탄천	탄천2교~광평교	30,500	800	‘21.10. 1.~'22. 5.16.	사고이월
송파	탄천	광평교~장지천·탄천 합류부	1,000	100	'21.10. 5.~‘21.10.26.	추경
강동	고덕천	해맞이교~리엔교	2,000	100	'21. 5. 3.~‘21. 6.21.
		시 자연생태과 시설부대비		3