문서번호	한양도성도감-23983
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
박지연		이원재	07/27
			김홍진
협조

관급자재(냉난방기) 변경계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

문 화 본 부

(한양도성도감)

관급자재(냉난방기) 변경계획 보고

(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사)

한양도성도감과장 :김홍진☎2133-2671 도성관리팀장 :이원재☎2670 담당 : 박지연☎2674

「남산 회현자락 한양도성 유적전시관」전시안내실에 필요한 관급자재(냉난방기)를 계약하였으나 공조설비 시운전이 계약기간 내 불가하여 납품기한을 연장하여 추진하고자 함

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성

ㅇ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

ㅇ 전시안내센터 건축개요

- 규 모: 지상 1층, 연면적 223.9㎡,

- 용 도: 안내실, 관리실, 전시실, 화장실

- 공사기간: 2020.4.30. ~ 2022.9.20. ※ 현재 창호 공사 중(공정률 71.18%)

ㅇ  관급자재(냉난방기) 구매내용

관급자재 구매대상 (납품요구번호)	세부품목	금 액
************ ******************	*************	***********
******* ******************	************	**********
******* ******************	************	***********
********* ******************	************	********
******		***********

※ 조달수수료(0.54%) : 173,910원

□ 변경내용

관급자재 구매대상 (납품요구번호)	변경 전	변경 후	증 감	비 고
******* **** ******************	********************	********************	******	****
******* ******************	********************	********************	******	****
******* ******************	********************	********************	******	****
********* ******************	********************	********************	******	****

ㅇ 계약금액 : 변경없음

ㅇ 변경사유 : 타일시공 지연으로 공조설비 시운전이 납품기한 내 불가함에             따라 계약기간 연장

□ 향후계획

ㅇ 재무과에 관급자재(냉난방기) 납품기한 변경요청하고 타일공사 완료(8월 셋째주)

후 냉난방기를 설치 및 시운전 후 납품기한(8.30.) 내 완료

붙임  1. 합의각서 2부.

2. 관급자재구매내역 1부.  끝.