문서번호	역사문화재과-29407
결재일자	2022. 8. 5.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	문화재사업팀장	역사문화재과장
김민석	신덕순	08/05
		이희숙

2022년도 국가등록문화재 「서울 여운형 묘소」

묘역 정비 설계도서 현장검토 결과 보고

2022.  8. 4. (목)

문  화  본  부

(역사문화재과)

2022년도 국가등록문화재 「서울 여운형 묘소」

묘역 정비 설계도서 현장검토 결과 보고

역사문화재과장 : 이희숙☎2133-2610 문화재사업팀장 : 신덕순☎2634 담당 : 김민석☎2633

강북구에서 2022년도 국가지정문화재 보수정비로 추진 중인 국가등록문화재「서울 여운형 묘소」묘역 정비공사를 위해 작성된 설계도서에 대해 관계전문가 합동 현장검토를 실시하고 검토결과를 보고함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022년도 국가등록문화재 「서울 여운형 묘소」 묘역 정비공사

○ 문 화 재 : 국가등록문화재 「서울 여운형 묘소」(등록일 : 2013.2.21.)

○ 소유/관리 : 기획재정부(국가)

○ 사업예산 : 총 50,000천원(국비 25,000, 시비 25,000)

○ 사업내용 : 묘역 내 석축 및 수목 정비

○ 세부사업지침

- 설계단계부터 관계전문가(문화재위원회 근대문화재분과 (전)문화재위원 또는 (전)문화재전문위원 최소 1명 이상 포함되도록 함)로 자문단을 구성하고 동 자문단의 자문을 받아 묘역 내 석축 및 수목을 정비한다.

□ 추진경위

ㅇ '21.  4월 : 2022년도 문화재보수정비 예산 신청(강북구)

ㅇ '21. 12월 : 2022년도 문화재보수정비 예산 확정통지(문화재청)

ㅇ '22.  2월 : 2022년도 문화재보수정비 예산 교부(문화재청)

ㅇ '22.  7월 : 설계승인 요청(강북구)

ㅇ '22.  8월 : 관계전문가 합동 현장검토 실시(서울시)

*************************

□ 현장검토

ㅇ 일    시 : 2022. 8. 3. (수) 14:00 ~ 16:00

ㅇ 검토장소 : 여운형 묘소 정비공사 예정 현장(강북구)

*******

*************************************

********************************

- 관 계 자 : 역사문화재과 담당 주무관, 강북구청 담당 주무관, 설계용역 수행업체 관계자 등

ㅇ 검토내용 : 문화재 현황 및 보수공사 설계도서 검토

************

***********************************************

**********************

**************************

□ 검토결과

ㅇ 설계도서 검토결과 : 조건부 승인

- 묘역 내 석축 및 수목 정비

ㅇ 승인조건

- 관계전문가 합동 현장검토 의견 반영하여 설계도서 수정·보완 후 재제출, 최종 설계도서 우리시 검토 완료 후 공사 시행

- 최종 제출된 설계도서에 따라 문화재수리 진행할 것

- 설계승인된 내용의 사업은 "문화재수리 등에 관한 법률" 제5조에 따라 문화재수리업자가 수리하여야 함

- 공사 추진 시 주요공정에 대해서는 관계전문가의 자문을 받아 시행

-「문화재수리 등에 관한 법률」 및 「문화재보호법」등 관계법규를 준수하여야 함

□ 향후계획

ㅇ '22. 8월 : 설계도서 검토결과 통지(서울시)

ㅇ '22. 8월 : 설계도서 수정·보완 제출(강북구)

ㅇ '22. 9월 : 공사 시행(강북구)

□ 행정사항

ㅇ 설계도서 검토결과 통지 : 강북구

**********************************

***********************************************

붙  임  1. 현장검토 결과서 1부.

2. 현장검토 참석명부 1부.

3. 문화재수리 설계승인서 1부.

4. 문화재수리 추진 시 준수사항(지방검토사업) 1부.  끝.