문서번호	공원운영과-27966
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	원장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
주수현	양근대	류기혁	08/16
			이용남
협 조
	주무관		안병욱

2022년 서서울호수공원 정비사업 변경사항 검토보고

2022.8.

공원운영과

(서서울호수공원)

2022년 서서울호수공원 정비사업 변경사항 검토보고

2022년 서서울호수공원 정비사업 추진과 관련하여 변경사항이 발생하여 다음과 같이 검토·보고 합니다.

□ 사업개요

○ 사 업 명: 2022년 서서울호수공원 정비사업

○ 위    치: 서서울호수공원 전구간

○ 사업기간: 2022.8.1.~ 10.19.

○ 사업내용: 공원시설물 및 녹지대 정비

○ 도 급 비: 금131,993,880원(금일억삼천일백구십구만삼천팔백팔십원정)

○ 도 급 자:****************

□ 변경사항

구분	현황 및 문제점	검토의견	비고
시설물	*************************************************************** ************* ****************** ******************* *	****************************************************************** *************** ******************** *************** ******************** *동일규격 타조달공급제품의 경우 운임비 별도로 금액추정이 어렵고 공사기간을 맞추기 어려움

□ 개략금액                                                   (단위:천원)

구 분	금 액
	당 초	변 경	증·감
총공사비	*******	*******	******
도 급 비	*******	*******	*
관급자재비	******	******	******

※ 상기 금액은 개략금액으로 현장여건에 따라 변경될 수 있음

□ 예산(시설비)집행실적 및 사용가능예산                    (단위:천원)

예산배정액	기지출액	도급액	낙찰차액	관급자재 원인행위액	예산집행잔액
*******	******	*******	******	******	******

□ 보고자의견

○ 조달청 관급자재 단가 변경에 따른 사항으로,

○ 예산집행잔액을 활용하여 신속하게 사업추진하는 것이 타당하다고 사료됨.  끝.