문서번호	주거환경개선과-11807
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경사업팀장	주거환경개선과장
이동호		안근	09/10 남정현
협조

삼양동 청년주택 건설공사(대행사업) 발주금액 변경사항 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.9

도시재생실

(주거환경개선과)

삼양동 청년주택 건설공사(대행사업)

발주금액 변경사항 검토

「빈집활용 도시재생 프로젝트」관련 삼양동 청년주택 건설공사의 원활한 사업 추진을 위해 대행계약 체결한 SH공사로부터 발주금액에 대한 변경요청이 있어 이에 대한 검토 보고드림

Ⅰ		추진 경위

❍ ‘19.07.23  삼양동 청년주택 신축공사 계약심사 완료

❍ ‘19.08.23  삼양동 청년주택 신축공사 공사시행 협조 요청

❍ ‘19.09.04  청년주택 신축공사 대행계약체결 방침

❍ ‘19.09.05  청년주택 신축공사 대행계약체결 협조요청(시->SH공사)

❍ ‘19.09.06  청년주택 건설공사(대행사업) 발주금액 변경 요청

Ⅱ		대행계약 체결 개요

❍ 개요

대지위치	서울특별시 강북구 솔매로 3-6	서울특별시 강북구 솔매로 3-10
지역/지구	제2종일반주거지역, 고도지구,	제2종일반주거지역, 고도지구,
용 도	단독주택	제1종근린생활시설, 단독주택
호 실	7	4
건축규모	****	****
대지면적	********	********
연 면 적	********	********

❍ 공사기간 : 착공일로부터 8개월

❍ **************************                   (단위 천원)

합계	건축공사	토목공사	설비공사	전기공사	통신공사	폐기물
*********	*********	*******	*******	*******	******	*****

※ 상기 공사비는 추후 정산

Ⅲ		발주금액 변경내용

❍ 변경금액 : **************************

(단위 천원)

구분	계약심사 방침	기간조정 (6개월->8개월)	‘19년하반기 노임반영	SH공사 제경비요율	누락사항 추가
*	*********	*********	*********	*********	*********
**	*********	*********	*********	*********	*********
**	*******	*******	*******	*******	*******
********	******	******	******	******	******
**	*******	*******	*******	*******	*******
**	*******	*******	*******	*******	*******
**	*******	******	******	******	******
***	*****	*****	*****	*****	*****

❍ 변경내용

***************************

****************************************************

*********************************************

************************************************

*************************************

**************

***********************************************************************

❍ 검토의견

- 상기내용에 대하여 검토한 바, 공사기간 조정(6개월->8개월), 2019년 하반기 건설 시중 노임단가 반영, SH공사 제경비율 기준 적용 및 누락사항에 대하여 변경이 타당하므로 우선 시행하고 추후 설계변경시 반영

· ******************************************

Ⅳ		향후 추진계획

************************

******************************

****************************

*********************************

*************************

*************************