문서번호	토목부-37042
결재일자	2022. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
조재근		김동철	12/21
			하현석
협조	주무관		박형재
	주무관		이현국

(월드컵대교 건설공사)

본선 교통신호기 기초 설치 검토보고

2022.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

(월드컵대교 건설공사)

본선 교통신호기 기초 설치 검토보고

서울지방경찰청 교통규제 심의 결과를 반영한 월드컵대교 본선 횡단보도 구간 내 교통신호기 기초 설치에 대한 검토의견을 보고드림.

*********************************

□ 사업개요

○ 위    치 : 영등포구 양평동 ~ 마포구 상암동

○ 규    모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○ 공사기간 : 2010.3.22. ~  2024.2.29.

○ 총사업비 : 4,553억원 ('22년 472억원)

○ 시 공 사 : 삼성물산(주)외 2, 감리사: (주)포스코건설외 1

□ 건설사업관리단 보고내용 (월드컵(감리)2022-1087호, `22.12.20.)

○ 실정보고 사유

- 교통안전시설 개선·설치 통보 (서울경찰청 교통관리과-14640)

☞ 신호기(보도, 차도) 신설(보행자 작동신호기 병행 설치)

- 교통신호기 기초가 공용중인 본선 교량상부 강바닥판에 용접 접합으로 설치됨에 따라, 품질확보 및 안전관리 등을 고려하여 토목공사에서 시행******************************************************

○ 본선 교통신호기 설치예정 위치도(교통신호기 6개소 신설)

○ 본선 교통신호기 설치 예정구간 현황사진 및 기초상세도

MP3(강남방향)	MP5(강북방향)	MP13(강북방향)

구분	차량용 신호기	보행자 신호기
측면도
기 초 상세도

○ 시공방안 검토

구분	수상작업	육상작업
장비	바지+예인선+고소작업차	교량점검차(굴절차)
개요도

☞ 교량 상부에서 교량점검차(굴절차)로 작업시 교통통제에 따른 시민불편 우려로 수상작업으로 시행

○ 수량 증감 현황

공종	규격	단위	당초	변경	증·감
교통신호기기초	차량용 및 보행용	EA	-	6	6

******************************************************

**	**	**	****	****	****	**	**
***** *****	******* *******	*	*******	*******	*******	*******

*************************************************

**********************************************************

공 종	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 · 감
*********	*	******	******
***********	*	******	******
*********	*	*******	*******

**********************************

□ 검토의견

○ 서울지방경찰청 교통규제심의 결과를 반영하여 본선 횡단보도 구간에 교통신호기 기초를 설치하는 보고 건으로,

○ 공용중인 상황을 고려한 월드컵대교 이용자의 불편을 최소화 하기 위해 수상작업으로 시공하는 방안은 적정함.

□ 조치계획

○ 서울경찰청 규제심의를 반영한 책임건설사업관리기술인의 검토의견이 타당하다고 판단되어 추후 설계변경 시 반영 조치코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술인 검토의견서(월드컵(감리)2022-1087호, `22.12.20.) 1부.  끝.