	관 악 구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 (사당배수분구 하수관로 종합정비공사)

우리구에서 시행중인 『사당배수분구 하수관로 종합정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 사당배수분구 하수관로 종합정비공사

나. 공사기간 : (총차) 2019.05.31. ~ 2022.12.31.

(4 차) 2022.03.18. ~ 2022.12.31.

다. 도 급 자 : 주계약자-이본건설(주) 대표 이준재/부계약자-근일건설 대표 여혜정

라. 감 리 사 : 동부엔지니어링(주), (주)동해종합기술공사, (주)수성엔지니어링

마. 설계변경 사유 : 현장여건(실정)에 따른 물량 증•감사항 반영

바. 설계변경 내역

총차 (7회)

(단위 : 원)

구 분		당초 금액	변경 금액	증 · 감
총 공 사 비		13,914,394,000	13,887,311,000	감)	27,083,000
도급비	공 급 가 액	9,839,863,636	10,116,825,455	증)	276,961,819
	부가 가치세	983,986,364	1,011,682,545	증)	27,696,181
	계	10,823,850,000	11,128,508,000	증)	304,658,000
관 급 비		1,699,786,000	1,664,786,000	감)	35,000,000
이전비 및 기타		612,178,000	293,096,000	감)	319,082,000
폐기물 처리비		778,580,000	800,921,000	증)	22,341,000

4차 (1회)

(단위 : 원)

구 분		당초 금액	변경 금액	증 · 감
총 공 사 비		4,800,000,000	4,772,917,000	감)	27,083,000
도급비	공 급 가 액	3,234,838,181	3,511,800,000	증)	276961819
	부가 가치세	323,483,819	351,180,000	증)	27,696,181
	계	3,558,322,000	3,862,980,000	증)	304,658,000
관 급 비		562,190,000	527,190,000	감)	35,000,000
이전비 및 기타		453,823,000	134,741,000	감)	319,082,000
폐기물 처리비		225,665,000	248,006,000	증)	22,341,000

사. 예산과목

- 물재생계획과, 하수시설관리(자본), 하수관로 종합정비, 사당배수분구 하수관로 종합정비, 시설비및부대비, 시설비(시비)

붙   임   1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경내역서(총차, 4차) 각 1부.

3. 설계변경 검토보고 1부.

4. 설계변경 검증확인서(총차, 4차) 각 1부.

5. 계약심사 결과 공문 1부. 끝.

주무관	변재석		하수팀장	조장호		치수과장	代조장호		안전건설교통국장	방성수
부구청장	12/15
이영기
협조자	계약팀장	최지영		재무과장	박준우		기획경제국장	선현철
시행	치수과-26133	(	2022.12.15	)	접수		(		)
우	08832	서울특별시 관악구 관악로 145, 관악구청 7층 치수과 (봉천동)	/	https://gwanak.go.kr
전화	02-879-6805	/전송	02-879-7841	/	bjs0810@ga.go.kr	/	부분공개(5)