문서번호	전산정보과-4448
결재일자	2023. 4. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장
박종회	한재훈	04/27
		안병희

상수도 자가통신망 맨홀파손 복구계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 04. 27.

요금관리부

(전산정보과)

상수도 자가통신망 맨홀파손 복구계획

부장 :안병희☎3146-1601 과장 :한재훈☎1560 담당 :박종회☎1583

본부와 동부수도사업소를 연결하는 자가통신망 맨홀상부 뚜껑이 파손되어 이와 관련 응답소 민원접수 현황과 조치계획을 보고드림

□ 응답소 민원현황

ㅇ 일   시 : 2023. 4. 19(수) 17:35 - 전산정보과 배정 4월25일(화)

ㅇ 장   소 : 성동구 행당동 318-1 자가통신망 수공#3

ㅇ 내   용 : 상수도 자가통신망 통신맨홀 상부 대리석이 깨져 교체 요청

※ 당초 주철 맨홀뚜껑 이었으나 2012년 디자인서울 거리조성 계획에 따라 성동구청에서 플래스틱과 석재가 접합된 디자인맨홀로 변경

□ 현장점검 및 업무협의

ㅇ 현장점검 : '23. 4. 25.(화)

- 맨홀 뚜껑 및 프레임 일부가 파손되어 내구성이 강한 재질로 교체 필요

맨홀주변 전경	맨홀뚜껑 파손	맨홀 프레임 파손

ㅇ 성동구청(보도관리팀) 교체방안 협의( ’23. 4. 26.)

- 현장여건을 고려 내구성이 강한 철재 뚜껑으로 교체(기존맨홀 생산 중단)

- 상수도본부에서 철재 맨홀뚜껑으로 교체하고 이에 따른 보도블록 마감 공사는 성동구청에서 시행하는 것으로 합동 대응

□ 공사계획

ㅇ 공사일정 : '23. 5. 3일 예정(맨홀보수 전문업체 협의중)

ㅇ 공사내용

- 기존맨홀 뚜껑(가로 1000 * 세로 755 * 높이 60) 및 철거

- 신설맨홀 규격으로 보도블럭 철거 및 콘크리트 기초 설치

- 수공1호 맨홀(가로 1120 * 세로 620 * 높이 130) 교체

ㅇ 시공계획도

□ 행정사항

ㅇ 신속한 시민불편 해소를 위해 본부 정보통신망 유지관리업체에서 선 시공 조치

ㅇ 향후 유지관리용역 설계변경시 직접경비에 반영

※ 예상공사비 1,500천원