문서번호	전산정보과-8691
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장
이정희	한재훈	08/29
		안병희
협 조

-2023년 정보시스템 운영 성과측정에 따른-

자재관리 정보시스템 개선 계획

2023. 8.

상수도사업본부

(전산정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 2023년 정보시스템 운영 성과측정에 따른 -

자재관리 정보시스템 개선 계획

요금관리부장 :안병희☎3146-1601 전산정보과장 :한재훈☎1560 담당 : 이정희☎1569

2023년 정보시스템 운영 성과 측정단계 측정결과 재개발로 인해, 시스템 개선 사항을 검토하고 개선을 위한 상세계획을 세우고자 함

Ⅰ		개 요

□ 2023년 정보시스템 운영 성과 측정 결과(범정부 EA포털 시스템)

정보시스템명		자재관리정보시스템	구축년도	2013
성과측정단계 측정결과	비용측면	****	성과측정 단계 유지관리유형	재개발
	업무측면	*

Ⅱ		검토결과 요약

□ 자재관리시스템 현황 분석 결과, 투자타당성 분석 및 정성적 효과 분석에서 재개발 효과가 큰 것으로 분석됨

□ 또한 개발 플랫폼 노후로 다양한 사용자 요구사항 대응에 한계가 있어, 최신 전자정부프레임워크, 시큐어 코딩, 사용자 편리성을 위한 기술 등의 적용을 위해 플랫폼 업그레이드가 필요함

□ 업무처리 환경 변화에 따라 시스템에 변경 프로세스를 반영하기 위해 업무절차 수정 및 DB 재설계가 필요함

Ⅲ		개선방안 도출

□ 요구사항 정의

○ 업무처리 프로세스 변경에 따라 분할된 기능을 통합하여야 함

○ 사용자별 알림 기능 및 개인 설정 등의 신규 기능이 있어야 함

요구사항	요구사항 내용
화면 통합	********************************* ******************************************* *****************************
업무처리 간소화	********************* **********************
개인별 설정 기능	************************** ********************** ********************************

□ 개발 및 구축범위

○ 소프트웨어 개발

⦁ 공사자재, 계량기, 약품별로 사용계획부터 재고관리까지 처리하는 시스템

⦁ 주요 기능

구분		상세 내용
공사자재 계량기	****	*****************
	****	***************
	****	**************************** *************
	****	*********************** **********************
계량기	******	************
	*****	*****************
	*****	****************
약품	****	*********
	****	********
	******	*****************
공통관리	*****	************
	****	****************
	******	***********
	****	*******************
	******	**********************
	******	*******
	******	*******************
타시스템연계	*****	********** ***********
	*******	**********************
	*******	********************
	*******	**************
	********	***************
	*********	***************

⦁ 기능점수 산출

구분		개수	가중치	기능점수	재사용 기능점수
데이터 기능	내부논리파일(ILF)	**	***	***	****
	외부연계파일(EIF)	*	***	*
트랙잭션 기능	외부입력(EI)	**	***	***	*****
	외부출력(EO)	**	***	*****	****
	외부조회(EQ)	***	***	*****	*****
총 기능점수				*******	*****

※ 단위프로세스별 영향계수가 달라 합계만 기재, 상세내용은 붙임 참조

⦁ 개발비 산출 (FP)

구분	내역
************	******
*********	********
*********	************
*********	************
****	**
*******************	***********
**************	************
****************	************
******	************

⦁ 개발비 산출 (투입공수: 데이터 이관비)

구분	내역
***********	**********
*********	**********
********	**********
*************	***********
****************	***********
******	***********

⦁ *****************************************

○ 정보자원 도입

⦁ 신규도입 자원(HW) 내역

명칭	구분	수량	제조사	제품명	비용
AP 서버 (운영, 개발)	신규	2			***********
******					***********

※ 데이터센터 정보자원 수요조사에 의한 비용 산출한 것으로 제조사와 제품명은 클라우드센터에서 2024년도 자원통합 사업자 선정 이후 확인 가능

⦁ 신규도입 자원(SW) 내역

명칭	구분	수량	제조사	제품명	비용
***	**	*	********	******	**********
***	**	*	********	****	**********
합계					**********
******					**********

⦁ 기존 정보자원 재활용

- DB 서버(Oracle 19C)는 기존 업무통합DB 서버 재활용

- 리포팅 툴(Clip 리포트) 신규 서버에 이전 설치

□ 투자타당성 분석

○ 순현재가치(NPV)가 ****************

연도*	비용** 소계(A)	비용 현재가치	편익*** 소계(B)	편익 현재가치	순편익 (B-A)	순편익 현재가치
*******	***********	***********			************	************
***	**********	**********	***********	***********	***********	***********
***	**********	**********	***********	***********	***********	***********
***	**********	**********	***********	***********	***********	***********
***	**********	**********	***********	***********	***********	***********
***	**********	**********	***********	***********	***********	***********
***	***********	***********	*************	*************	*************	*************

* 비용 및 편익 추정연도는 개선 정보시스템의 생명주기에 따라 설정(최소 5년에서 최대 10년)

** 총개발비, 운영유지보수비를 산정하여 반영, 현재가치 산출 시 사회적 할인율 4.5% 적용

□ 정성적 효과 분석

○ 신규 기능 추가에 따른 생산성 및 효율성 향상

○ 반응형 웹 적용 및 성능 향상을 통한 편의성 제고

○ 전자정부프레임워크 및 시큐어 코딩 적용에 따른 안전성과 보안성 향상

○ 업무절차간소화, 기능 통합, 통계기능 강화 및 개인별 설정 기능 제공으로 내부 고객 만족도 향상

Ⅳ		최종투자의사결정

□ 최종 의사결정 : 재개발

□ 평가의견

○ *********************************************

○ 또한 생산성 및 효율성 향상, 서비스 품질 향상, 내부고객 만족도 향상 등의 정성적 효과가 큼

○ 따라서, 본 사업은 경제성이 매우 크고, 다양한 정성적 효과를 통한 시스템 내부 직원들의 만족도가 클 것으로 예상되어 재개발을 위한 투자를 결정함

○ ***************************************************************************

Ⅴ		세부 추진일정

□ 추진기간 : 2024. 3. ~ 2024. 11.

□ 추진일정

구분	2024년
	3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월
발주·사업자선정
분석 및 설계
프로그램 개발
테스트·운영

붙임  재개발비 FP 산정 자료 1부.  끝.