문서번호	시설보수과-8590
결재일자
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
김지하		안준수	09/11 최연우
협조
	주무관		정병구

- 2023년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사 -

낙찰차액 등 사용계획 보고

2023. 9.

서부도로사업소

(시설보수과)

- 2023년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사 -

낙찰차액 등 사용계획 보고

「2023년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사」추진 관련 낙찰차액 등 사용계획에 대해 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 2023년 도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수공사

❍ 공사기간 : 2023. 1. 16. ~ 2023. 12. 31.

❍ 공사내용 : 절삭후 덧씌우기 43a, 신축이음보수 51m, 단면보수 41㎡ 등

❍ 총공사비 : **************************************************

❍ 도 급 사 : ***************

Ⅱ		공사 추진현황

❍ 공사비 집행현황(공정율 96%)                                  (단위:  천원)

계약금액	집행(예정)액	잔 액	비고
*********	*********	******	*******************

❍ 차수별 작업내역

차수	작업내용	작업기간	공사비(천원)
1차	금화터널 제연설비 강지보 제작·설치	2. 17.~5. 25.	*******
2차	안전점검 지적사항 및 민원사항 (잠수교북단지하차도등 7개소)	2. 23.~3. 31.	******
3차	남산터널 관리동(6개소) 보수	4. 01.~6. 30.	*******
4차	안전점검 지적사항 및 민원사항 (서빙고지하차도등 9개소)	6. 08.~8. 07.	*******
5차	안전점검 지적사항 및 민원사항 (성산지하차도등 11개소)	6. 29.~9. 09.	*******
6차	불광천복개, 욱천복개2 포장정비	7. 10.~9. 09.	*******
7차	성산지하차도 포장정비	7. 19.~8. 31.	******
	계		*********

Ⅲ		낙찰차액 등 사용계획

□ 필요성 검토

❍ 각 시설물별 안전점검, 해빙기, 우기철 등 특정시기 점검 지적사항과 민원사항 등에 대해 적기 조치하여 현재 일상유지보수공사 계약금액의 96%가 집행된 상황으로

❍ 향후 추석 및 겨울철 대비, 하반기 정기점검 등에 따른 지적사항 및 긴급 민원사항 등에 대해 신속한 조치를 위해서는 추가 공사비 확보가 필요한 실정임.

❍ 아울러 지하차도 비상대피 시설 설치 계획(재난안전관리실장방침,도로시설과-3467)에 따라 관내 지하차도 5개소에 비상대피 시설 설치를 위한 예산(약 57,600천원) 확보가 필요한 실정임.

□ 가용예산 현황

(단위:  천원)

예산액 ①	발주금액 ②	계약금액 ③	가용금액			비고
			계	계약심사 차액 ④=①-②	낙찰차액 ⑤=②-③
*******	*******	*******	*******	******	******

□ 조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 점검 지적사항 및 민원사항 처리, 지하차도 비상대피 시설 설치를 위해 낙찰차액 및 계약심사차액을 사용하고자 함.

Ⅳ		향후계획

❍ 2023. 9.~ : 점검 지적사항 및 민원사항 작업 시행

❍ 2023. 10. : 지하차도 비상대피 시설 설치 완료(10/15까지)

❍ 2023. 12. : 설계변경(정산) 및 준공.

붙임  지하차도 비상대피 시설 설치 협조요청 공문 등 2부.  끝.