"행복한 미래 새로운 중랑"
	중 랑 구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2회) 시행[2023년 하수관로 준설 및 청소(세정)공사(연간단가)]

우리 구에서 시행중인 “2023년 하수관로 준설 및 청소(세정)공사-연간단가”에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 하수관로 준설 및 청소(세정)공사-연간단가

2. 공사기간 : 2023. 3. 13. ~ 2023. 12. 31.

3. 총사업비 : 2,631백만원 (구비 2,321백만원, 시비 310백만원)

4. 도 급 자 : ㈜은서 대표 왕향주

5. 설계변경 내역(제2회)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고 (증/감)
		당 초	변 경
총공사비		2,631,000,000	3,621,000,000	증) 990,000,000
도급비	공급가액	2,264,300,000	3,164,300,000	증) 900,000,000
	부가가치세	226,430,000	316,430,000	증) 90,000,000
	합 계	2,490,730,000	3,480,730,000	증) 990,000,000
이 전 비		140,270,000	140,270,000	-

6. 예산과목

-(구비)치수과, 하수도 관리, 하수도관리, 하수도 준설, 시설비 및 부대비, 시설비

-(시비)물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비(공기업)

-(시비)치수안전과, 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 하천준설 및 시설물유지관리, 시설비및부대비, 시설비(재배정)(증 490백만원)

-(시비)물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로 신설개량, 하수관로 유지관리비, 수선유지교체비, 수선유지비(공기업)(증 500백만원)

붙임  1. 설계변경 내역서(제2회) 및 설계변경 사유서 각 1부.

2. 일상감사 결과통보서 1부.  끝.

주무관	박종희		하수팀장	장승훈		치수과장	민태종		안전건설교통국장	09/15
이유경
협조자	계약팀장	이옥희		재무과장	한덕임
시행	치수과-23105	(	2023. 9. 15.	)	접수		(		)
우	02043	서울특별시 중랑구 봉화산로 179 (신내동)		https://www.jungnang.go.kr
전화	02-2094-2757	/전송	02-490-4498	/	bakj24@jn.go.kr	/	부분공개(5)