문서번호	토목부-19245
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
김종혁		박운용	10/18
			이임섭
협조

설계변경 검토 보고

[월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역]

2023. 10.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경 검토 보고

[월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역]

********************수립 시************************************* 정산 계획 보고임.

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

ㅇ ********************************************

*****************************************************************

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 서울특별시 영등포구 양평동 월드컵대교 남단 일대 등

ㅇ 규    모 : 연결로 5개소, 지하차도, 보행육갑문 설치 등

ㅇ 용역기간 : 2017.8.7. ~ 2023.10.31.

ㅇ 용역금액 : 3,402백만원

ㅇ 용 역 사 : ㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링, ㈜지아이건설기술그룹

□ 추진경위

ㅇ '17.08.07. : 보완설계용역 계약 및 착수

*****************************

ㅇ '23.10.05. : 유관부서(설치 및 유지관리) 합동회의

***************************************

Ⅱ		설계변경 검토 내용

□ 설계변경 사유

ㅇ *******************************************************************.

ㅇ「********************************************************************************************.

□ 설계변경 내역

(단위 : 원)

***	**	**	**
*********	*************	*************	**********
**************	*	**********	**********

ㅇ 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교 건설, 시설비

□ 설계감리(건설사업관리자) 검토 의견

ㅇ ******************************************************* 집행은 적절함.

Ⅲ		향후 계획

ㅇ '23.10.  : 설계변경 계약

ㅇ '23.10.  : "월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역" 등 준공

붙임 : 1) 설계감리(건설사업관리자) 검토의견서 및 내역서 1부.

2) ******************************************* 1식.(용량초과로 별도 보관) 끝.