문서번호

도로과-22504

주무관

도로관리팀장

도로과장

안전건설교통국장

부구청장

위찬우

代염영길

전영호

박승일

10/27

등록일자

2023. 10. 27.

결재일자

2023. 10. 27.

김선수

공개여부

대시민공개

협 조

「2023년 주민참여 도로정비공사(연간단가)」  설계변경(1회) 시행 검토 보고

용  산  구

「2023년 주민참여 도로정비공사(연간단가)」

설계변경(1회) 시행 검토 보고

「2023년 주민참여 도로정비공사(연간단가)」추진과 관련, 공사물량 변동에 따른 설계변경(1차) 시행 검토 보고임

Ⅰ		공사개요

☐ 공 사 명 : 2023년 주민참여 도로정비공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2022. 3. 30. ~ 2023. 12. 22.

□ 공사규모 : 지장물 철거 및 도로정비 1식 등

□ 도 급 비 : 276,404천원

□ 도급업체 : 대명토공(주) 대표이사 김경건

Ⅱ		설계변경 사유

□ 추가공사에 따른 물량 증가 등 반영【도로과-13469호(`23.7.19.)】

○ 청파동1가 89-46 ~ 93-31 도시계획시설(도로) 지장물 철거 및 도로정비

- 예 산 액 : 208,750천원

- 정비규모 : 지장물 철거 1식, 아스콘재포장 4a, 도로경계측구 500m 등

- 위    치 : 효창원로98길(폭 4~6m, 연장400m)

○ 골목길 보행환경 개선사업, 보행자 중심의 골목길 조성사업

- 예 산 액 : 총 800,000천원(구비 600,000천원, 교부세 200,000천원)

- 정비규모 : 도로정비 30a 등

- 위    치 : 녹사평대로54길 13 ~ 13-9 외 20개소 (B=1~3m, L=1,500m)
(장비진입이 불가능한 좁은 골목길)

○ 장문로 외 1개소 노후도로 정비사업

- 예 산 액 : 348,600천원

- 정비규모 : 아스콘 재포장32a, 도로 경계측구 및 경계석 600m 등

- 위    치 : 서빙고로417~장문로141, 한강대로121~한강대로39길

(폭 6~20m, 연장300m)

□ 용산2가동 경로당 주변 도로정비공사 계획변경 시행 보고【도로과-10346호(`23. 6. 7.)】

- 도로정비는 공법을 변경하여 시공(당초 ; 아스콘재포장 → 변경 : 미끄럼방지(박층)포장

- 당초 정비예산은 주변의 포장상태가 불량한 정비대상지 인접 구간으로 변경 시행

Ⅲ		설계변경 시행계획

□ 주요 물량 증·감 사항

연 번	공 종		단위	당 초	변 경	증 ㆍ 감
1	토공	콘크리트깨기	㎥	1	199	증	198
2	토공	파쇄물절취	㎥	20	115	증	95
3	포장공	콘크리트포장	a	0.1	8.5	증	8.4
4	포장공	아스콘표층공	a	10	62	증	52
5	포장공	절삭후 아스콘표층공 (이면도로,서울형,야간)	a	0.5	47.1	증	46.6
6	구조물공	기초콘크리트타설	㎥	1	106	증	105
7	구조물공	PC측구 제작 및 설치	m	5	475	증	470
8	구조물공	도로경계석 설치	m	50	607	증	557
9	구조물공	빗물받이 설치(2호)	개	1	24	증	23

□ 총사업비 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비	490,334,900	1,882,350,000	증	1,392,015,100
도 급 비	276,404,900	1,116,555,000	증	840,150,100
관급자재비	144,012,240	653,242,919	증	509,230,679
이설비및기타	69,917,760	112,552,081	증	42,634,321

□ 예산과목(증액되는 도급비 기준) : 840,150,100원

- 도로과, 도로시설 관리, 도로정비 관리, 골목길 보행환경 개선사업, 시설비 및 부대비, 시설비(구비) - 증) 200,000,000원

- 도로과, 도로시설 관리, 도로정비 관리, 관내 보행자 중심의 골목길 조성사업(교부세), 시설비 및 부대비, 시설비(구비) - 증) 200,000,000원

- 도로과, 도로시설 관리, 도로개설 및 확장, 도시계획시설(도로) 지장물 철거 및 도로정비, 시설비 및 부대비, 시설비(구비) - 증) 127,575,590원

- 도로과, 도로시설 관리, 도로정비 관리, 장문로 외 1개소 노후도로 정비사업, 시설비 및 부대비, 시설비(구비) - 증) 312,574,510원

Ⅳ		향후계획

□ 2023. 10. ~ : 상기 보고내용과 같이 변경사항에 따른 시공물량 증·감 사항을 반영하여 설계변경(1회)을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경(1회) 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.
3. 계약심사 결과 1부.

4. 관련보고서 각1부.