문서번호	정수시설과-10318
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김윤재		정인영	11/30
			서한호
협 조
	주무관			배용우

설계변경 심의위원회 개최  [2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)]

설계변경 심의위원회 개최

[2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)]

2023. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최

[2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)]

우리 정수센터에서 시행중인「2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)」건의 물량 증감 등 변경사항이 발생되어 설계 변경하기 위한 심의위원회를 개최하고자 함

□ 사업개요

ㅇ 공  사  명 : 2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)

ㅇ 계약금액 : ***********************

ㅇ 계약기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 계약상대자 : **************************************

□ 심의위원회 개최

ㅇ 심의일정 : 2023. 12. 01. 09:00 ~ 10:30

ㅇ 심의장소 : 뚝도아리수정수세터 정수시설과

ㅇ 심의위원 : 총 5명

- 심의위원장 : 정수시설과장

- 심의위원 : **************************************

ㅇ 심의내용

- 설계변경의 타당성

- 단가 산출 및 내역서 계산식 적정 여부

- 제경비 요율 산정 및 적용의 적정 여부

- 각종 제반 규정 준수 여부

- 기타 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토

□ 설계변경 내역

ㅇ 변경사유 : 물량 증감 및 제경비 정산에 따른 설계 변경

ㅇ 계약기간 : 변경 없음(2023. 1. 1. ~ 12. 31.)

ㅇ 계약금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 / 감
공급가액	**********	**********	***	*********
부가가치세	*********	*********	***	*******
합 계	**********	**********	***	*********

붙임  1. 설계변경 심의 요구서 1부.
2. 설계변경 내역서 및 사유서 각 1부.
3. 설계변경 검토 의견서 및 결정서(양식) 1부.  끝.