문서번호	정수시설과-10367
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김윤재		정인영	12/01
			서한호
협 조
	주무관			배용우

설계변경 심의위원회 개최 결과보고 [2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)]

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

[2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)]

2023. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

[2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)]

우리 정수센터에서 시행중인「2023년 뚝도아리수정수센터 CCTV설비 보수공사(연간단가)」건의 물량 증감 등 변경사항이 발생되어 설계 변경하기 위한 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ 설계변경 심의위원회 개최 보고(정수시설과-10318, 2023.11.30.)

□ 심의개요

ㅇ 심의일정 : 2023. 12. 01. 09:00 ~ 10:30

ㅇ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

ㅇ 위원구성

- 심의위원장 : **********

- 심의  위원 : **************************************

□ 심의내용

ㅇ 설계변경 타당성 및 변경계약금액 적정성 여부

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 / 감
공급가액	17,000,000	15,841,820	(감)	1,158,180
부가가치세	1,700,000	1,584,180	(감)	115,820
합 계	18,700,000	17,426,000	(감)	1,274,000

ㅇ 설계변경 내역에 대한 단가 산출 및 적용 적정성 여부

- 제경비(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료) 감액

- 물량 증가 : 카메라(관급자재) 설치 등 10개 공종 발생

- 물량 감소 : 스피드 돔 카메라 설치 등 14개 공종 발생

□ 심의결과

ㅇ 설계변경의 타당성 : 타당

ㅇ 단가 산출 및 내역서 계산식 적정 여부 : 적정

ㅇ 제경비 요율 산정 및 적용의 적정 여부 : 적정

ㅇ 각종 제반 규정준수 여부 : 특이사항 없음

ㅇ 기타 관련 규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 특이사항 없음

□ 행정사항

ㅇ 설계변경 심의 결과에 의거 설계변경 시행및 변경계약 의뢰

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.
2. 설계변경 사유서 1부.
3. 설계변경 심의 의견서 및 조정내역 1부.  끝.