문서번호	시설관리과-21882
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
최대진		代최대진	12/07
			조임남
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(2023년 유량계 유지관리용역)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2023년 유량계 유지관리용역)

2023.  12.

남부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2023년 유량계 유지관리용역)

수도시설과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 : 오정훈☎4614 담당 : 최대진☎4623

「2023년 유량계 유지보수용역」시행중인 신규공종 및 물량증감이 발생됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 계약현황

ㅇ 용 역 명 : 2023년 유량계 유지보수용역

ㅇ 계 약 자 :****************

ㅇ 계약금액 : **********

ㅇ 용역기간 : 2023. 03. 13 ~ 2023. 12. 31

ㅇ 용역내용

- 대 상 : 72개소(구역 9, 중블럭 34, 배수지·아리수올림터 29)

- 유량계 교정검사 : 배수지·올림터 32개소(연1회, 예비 3회)

- 유량계 점검보수 : 전체 유량계 유지관리를 위한 점검 및 보수

□ 심의위원회 개최

ㅇ 심의일시 : 2023. 12. 7(목) 10:00

ㅇ 심의장소 : 시설관리과 사무실(2층)

ㅇ 심의내용 : 계약내역 변경에 대한 적정 심의

ㅇ 참석위원

- 위원장 : **********

- 위  원 : **********************************

- 간  사 : ********

□ 위원회 심의결과 : 적정

ㅇ 설계변경 타당성 : 타당

ㅇ 제경비 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

ㅇ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 설계변경 사유 및 내용

ㅇ 사유 : 과업 추가 및 감소에 따른 신규공종 발생 및 계약물량 변경

ㅇ 변경금액 : ************

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총 계약금액	***********	***********	***********

ㅇ 세부내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감
재료비	***********	***********	************
노무비	***********	***********	************
경비(산업안전보건관리비)	**********	**********	***********
소 계	***********	***********	************
부가세	**********	**********	***********
합계	***********	***********	************

□ 처리의견

ㅇ 설계변경 심의위원회 개최결과 적정하게 설계변경된 것으로 심의되어 행정지원과에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙  임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의의결서 1부.

3. 설계변경 합의서 1부.  끝.