문서번호	급수설비과-10892
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
김기봉		代최성태	12/08
			송헌영
협 조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고(강서,서부지역 건설사업관리용역)

강서·서부지역 상수도공사 (급수,누수복구,시설물,관세척) 건설사업관리용역

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

2023. 12.

급   수   부

(급수설비과)

강서·서부지역 상수도공사 (급수,누수복구,시설물,관세척) 건설사업관리용역

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

우리 본부에서 추진하고 있는「강서·서부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물,관세척) 건설사업관리용역」의 설계변경 심의위원회 개최 결과를 보고 드림.

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 강서,서부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물,관세척)

건설사업관리용역

ㅇ 계 약 자 : (주)천일 대표 김도빈 등 3개사

ㅇ 용역기간 : ‘23. 06. 22. ~ ‘23. 12. 31. (1차)

〔 ‘23. 06. 22. ~ ‘25. 06. 21. (총차) 〕

ㅇ 계약금액 : ********************

〔**********************〕

ㅇ 용역개요

- 급수공사 분야(급수공사,불용관,보호통교체, 포장 등) : 14,298건

- 누수복구 분야(누수복구,포장,동결관 정비 등) : 16,238건

- 시설물 분야(노후밸브교체,배수지, 맨홀정비(관세척) 등) : 5,462건

- 관세척 및 기타사항(사업소 지시시항 포함) : 1식

□ 설계변경 심의위원회 개최 현황

ㅇ 일  시 : ’23. 12. 08.(금) 11:00

ㅇ 장  소 : 4층 소회의실

ㅇ 위원회 구성

- 위원장 : 급수설비과장

- 위  원 : 계획설계과 시설6급 김영규, 배수과 시설6급 문정주, 급수운영과 시설6급 김민룡, 급수설비과 시설6급 최성태

ㅇ 심의안건 : 설계변경 적정성 심의

□ 설계변경 사유

ㅇ 2023년 상수도관 세척사업 건설사업관리기술인 추가투입 및 기간변경  급수운영과-6815(2023.8.04) / 급수운영과-10160(2023.11.28)

- 추가투입내역 : 중급기술인 1인, 차량1대

사업소	건설사업관리기술인		배치기간		비고
	당초	변경	당초	변경
강서	-	중급 1명	-	23.8.7~11.30
서부	중급1명	변경없음	23.7.17~11.30	23.7.17~12.05

ㅇ 사업소별, 공사별 업무량을 예상하여 설계된 물량을 실제 근무일 기준으로 정산시행에 따른 물량증감

ㅇ 기타 휴일 및 시간외 등 근무일수 조정 및 안전관리비 정산에 따른 물량증감

□ 설계변경 현황

ㅇ 투입인원 증감내역

분 야	규 격	단위	증감 물량		증·감
			당 초	변 경
총차	고급(평일)	인.월	******	******	******
	중급(평일)	인.월	*******	*******	******
	초급(평일)	인.월	*******	*******	******
	중급(휴일및시간외)	인.일	*******	*******	*******
	초급(휴일및시간외)	인.일	*********	*********	********
금차(1차)	고급(평일)	인.월	*****	*****	******
	중급(평일)	인.월	******	******	******
	초급(평일)	인.월	******	******	******
	중급(휴일및시간외)	인.일	*******	*******	*******
	초급(휴일및시간외)	인.일	*******	*******	********

ㅇ 계약금액 변경 내역                                   (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총차 계약금액	*************	*************	***********
1차 계약금액	*************	*************	***********

□ 심의결과 : 원안 가결(적정)

□ 행정 사항

ㅇ 설계변경 시행 및 계약 의뢰(재무회계과)

붙임  1. 설계변경 내역서  1부.

2. 설계변경 심의위원회 의결서  1부.  끝.