문서번호	급수설비과-10893
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
윤혜정		代최성태	12/08
			송헌영
협조

강남, 남부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물,관세척) 건설사업관리용역

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

2023. 12.

급수부

(급수설비과)

강남, 남부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물,관세척) 건설사업관리용역

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리 본부에서 추진하고 있는 「강남, 남부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물,관세척) 건설사업관리용역」의 설계변경 심의위원회 개최 결과를 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 강남, 남부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물,관세척) 건설사업관리용역

ㅇ 계약상대자 : *********************************

ㅇ 용역기간 : ’23. 6. 22.~’23. 12. 31. (총차 : ’23. 6. 22.~’25. 6. 21.)

ㅇ 계약금액 : *************************************

ㅇ 용역개요

- 급수공사 분야(급수공사,불용관,보호통교체, 포장 등) : 14,408건

- 누수복구 분야(누수복구,포장,동결관 정비 등) : 14,122건

- 시설물 분야(노후밸브교체,배수지, 맨홀정비(관세척) 등) : 5,528건

- 관세척 및 기타사항(사업소 지시시항 포함) : 1식

□ 설계변경 심의위원회 개최 현황

ㅇ 일   시 : ’23. 12. 8.(금) 11:00

ㅇ 장   소 : 4층 소회의실

ㅇ 위원회 구성

- 위원장 : 급수설비과장

- 위  원 : 계획설계과 시설6급 김영규, 배수과 시설6급 문정주
급수운영과 시설6급 김민룡, 급수설비과 시설6급 최성태

ㅇ 심의안건 : 설계변경 적정성 심의

□ 설계변경 사유

ㅇ 2023년 상수도관 세척사업 건설사업관리기술인 추가투입 및 기간변경
[급수운영과-5419호(2023. 6. 23.), 급수운영과-6815(2023. 8. 4.)]

- 추가투입내역 : 중급기술인 1인, 차량 1대

사업소	건설사업관리기술인		배치기간		비고
	당초	변경	당초	변경
강남	-	중급1명	-	’23.7.17.~11.30.
남부	중급1명	변경없음	’23.7.17.~9.30.	’23.7.17.~11.30.

ㅇ 사업소별, 공사별 업무량을 예상하여 설계된 물량을 실제 근무일 기준으로 정산시행에 따른 물량증감

ㅇ 기타 휴일 및 시간외 등 근무일수 조정 및 안전관리비 정산에 따른 물량증감

□ 설계변경 현황

ㅇ 투입인원 변경내용

분 야	규 격	단위	증감 물량		증·감
			당 초	변 경
총차	고급(평일)	인.월	******	******	*	*****
	중급(평일)	인.월	*******	*******	*	*****
	초급(평일)	인.월	*******	*******	*	*****
	중급(휴일및시간외)	인.일	*******	*******	*	******
	초급(휴일및시간외)	인.일	********	********	*	*****
금차(1차)	고급(평일)	인.월	*****	*****	*	*****
	중급(평일)	인.월	******	******	*	*****
	초급(평일)	인.월	******	******	*	*****
	중급(휴일및시간외)	인.일	*******	*******	*	******
	초급(휴일및시간외)	인.일	*******	*******	*	*****

ㅇ 계약금액 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총차 계약금액	*************	*************	************
1차 계약금액	*************	*************	************

□ 심의결과 : 원안 가결(적정)

□ 행정사항

ㅇ 설계변경 시행 및 계약 의뢰(→재무회계과)

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 의결서 1부.  끝.