문서번호	급수운영과-20585
보존기간
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최성현	양재덕	12/14
		이규희

설계변경 검토결과 보고

(2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사)

2023. 12.

강동수도사업소

급수운영과

설계변경 검토결과 보고

『2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 설계변경 보고서가 제출되어 검토하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

ㅇ 설계변경(정산) 검토보고서 제출(공사감독2처-16805, '23. 12. 12.)

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 17. ~ 2023. 12. 29.

ㅇ 계약금액: ***********원

ㅇ 공사개요: D=100~300mm, L=1,330m 등

ㅇ 도 급 자: ******************

ㅇ 감 독 자: 서울시설공단 공사감독2처 유현석

Ⅱ		보 고 내 용

□ 설계변경 개요

ㅇ 변경금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
도 급 액	***********	***********	*************

ㅇ 주요공종 변경내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감
****	**********	*	*****	*****	*****
******	**********	*	***	***	******
******	**********	*	**	**	****

□ 심의내용

ㅇ 신규대가 적정 정용여부 확인

ㅇ 수량산출 적정성

ㅇ 기타 부대공 등 실 투입 수량으로 정산

ㅇ 심의자: 서울시설공단 공사감독2처장 외 2명

ㅇ 세부내용

- 공사 실정보고

연번	구분	변경내용	관련근거
1	1차 실정보고	********************* *************	• 급수운영과-13653 (2023. 8. 21.)
2	2차 실정보고	**********************	• 급수운영과-15682 (2023. 9. 21.)
3	3차 실정보고	*********************	• 급수운영과-15682 (2023. 9. 21.)
4	4차 실정보고	*********	• 급수운영과-18829 (2023. 11. 15.)
5	5차 실정보고	********	• 급수운영과-19400 (2023. 11. 24.)

- 사업소 작업지시

연번	구분	변경내용	관련근거
1	1차 작업지시	*******************************	• 급수운영과-16703 (2023. 10. 12.)
2	2차 작업지시	**********************************	• 급수운영과-18149 (2023. 11. 3.)

- 제경비 등 실 사용에 따른 정산 및 제비율 변경

연번	구분	변경내용	비고
1	4대 보험료 등 정산	- 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금, 건설기계대여대금, 고용개선지원비 정산 - 산업안전보건관리비, 환경보전비 실 사용 정산
2	부대공, 안전관리비 등 정산	- 부대공, 안전관리비, 고용개선지원비 등 실 사용 수량 정산

Ⅲ		검 토 결 과

□ 서울시설공단으로부터 제출된 공사실정보고 및 설계변경 검토보고서 검토 결과 현장여건에 따른 설계변경 사유에 해당됨

Ⅳ		조 치 계 획

□ 설계변경이 타당함으로 설계변경 시행 후 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙임  1. 설계변경 검토보고 및 보고서 제출 공문 각 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.  끝.