문서번호	교통행정과-126087
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		교통개선팀장	교통행정과장		건설교통국장
김현경		代김정은	윤희은		전결 12/14
					이상용
협 조
						재무과장		이성수
						계약심사팀장		유운숙
						예산팀장		김혜영
						계약팀장		심은진

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

「2023년 교통안전시설물 정비공사(연간단가)」 설계변경 및 낙찰차액 사용 계획

2023. 12. 12.

건설교통국

(교통행정과)

「2022년 교통안전시설물 정비공사(연간단가)」

설계변경 및 낙찰차액 사용 계획

우리구에서 시행중인「2023년 교통안전시설물 정비공사(연간단가)」공사 중 추가 공사 시행으로 인한 공종별 시공물량의 증감사항이 발생하여 사업예산이 부족한 실정으로 낙찰차액을 사용하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

1		공사개요

□ 공 사 명 : 2023년 교통안전시설물 정비공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2023. 2. 21. ~ 2023. 12. 31.

□ 공사위치 : 강동구 관내

□ 도 급 자 : ㈜큰솔애드컴

□ 도 급 비 : 금139,301,690원

□ 예산과목

○ 교통행정과, 교통시설물 구축, 교통시설물 확충, 교통시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

2		예산현황

□ 예산 집행내역

(단위:원)

예산액	집행(원인행위)내역			낙찰차액	심사절감액
	소 계	도급비	관급비
180,000,000	155,610,690	139,301,690	16,309,000	21,687,310	2,700,000

3		설계변경사유

□ 설계변경 사유

○ 어린이보호구역 내 시설물 정비, 경찰서 규제사항 및 각종 민원사항 처리에 따른 공종별 시공물량 증‧감 발생

○ 교통안전시설물(볼라드, 안전휀스, 시선유도봉 등) 정비 민원 급증으로 작년대비 소요예산 증가

□ 낙찰차액 및 타예산 사용

○ 어린이보호구역 내 시설물 정비, 경찰서 규제사항 및 각종 민원사항 처리로 발생한 공사비 증액분에 대하여 시비 재배정 예산, 낙찰차액을 사용하고 부족분에 대하여 구비 잔여예산(어린이보호구역 정비)을 활용하여 설계변경 시행

○ 예산과목 및 사용계획

구분	예산과목	사용 금액(원)	비 고
시비	도시교통실 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비	19,000,000
구비	교통시설물 구축, 교통시설물 확충, 어린이보호구역 정비, 시설비 및 부대비, 시설비	27,785,000	- 예산 변경사용
구비	교통행정과, 교통시설물 구축, 교통시설물 확충, 교통시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비	21,687,310	- 낙찰차액
총 합		68,472,310

4		설계변경 세부내역

□ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감		비 고
총공사비	155,610,690	224,083,000	증)	68,472,310
도급비	139,301,690	192,420,000	증)	53,118,310
관급비	16,309,000	31,663,000	증)	15,354,000

□ 주요 공종별 물량 변경 내역

공종	단위	당초수량	변경수량	증‧감		비고
안전휀스 제작설치	경간	1	12	증)	11
시선유도봉 교체	개	30	65	증)	35
볼라드 정비	개	250	435	증)	185
무단횡단금지휀스 정비	개	20	47	증)	27
원형 신설(D600)	매	10	32	증)	22
사각 교체(600*600)	매	10	24	증)	14
표지판 방향 조정	개소	50	77	증)	22

5		조치계획

□ 어린이보호구역 내 시설물 정비, 경찰서 규제사항 및 각종 민원처리에 따른 시공물량 증‧감사항을 반영하여 설계변경 심의위원회 상정 및 감사담당관 일상감사를 실시하고, 그 결과를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증결과 1부.  끝.