문서번호	치수과-27394
결재일자	2023. 12. 19
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 제958호

주무관		하수관리팀장		치수과장	건설교통국장		부구청장
이제응		허광호		이일환	권기욱		12/19
							마채숙
협조
	도로과장		김세율
	도로계획팀장		代권용재
	도로관리팀장		권대현
	보도관리팀장		손영환
	굴착관리팀장		代유진호
	도로조명팀장		송성호
	하천관리팀장		강안회

- 2023년 건설폐기물 처리용역(연간단가)-

설계변경(정산)보고

건 설 교 통 국

치  수  과

- 2023년 건설폐기물 처리용역(연간단가)-

설계변경(정산)보고

「2023년 건설폐기물 처리용역(연간단가)」각 공사현장여건에 따른 폐기물 물량수량 증·감 반영에 따른 설계변경(정산) 보고임

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 2023년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

□ 기    간 : 2023. 4. 6. ~ 2023. 12. 31.

□ 용역개요

○ 건설폐기물 운반 : 9,038㎥

○ 건설폐기물 처리 : 20,668ton

□ 도 급 자 : (주)지솔알이에이치

□ 총용역비 : 848백만원

Ⅱ		설계변경 내용

□ 김상옥로 보행환경 개선사업 등 추가공사 발생으로 인한 시공물량 증가

□ 각 공사별 폐기물 수량 증·감 발생에 따른 변경

□ 폐기물 운반량

공종		단위	운 반 량
			당초	변경	증.감
폐기물운반비	폐콘크리트	㎥	4,329	5,670	증)1,341
	폐아스팔트콘크리트(유상)		3,039	5,096	증)2,057
	폐아스팔트콘크리트(재생)		600	-	감)600
	건설폐재류(벽돌·블록등 철거잔재)		1,000	29	감)971
	혼합건설폐기물		-	-	-

□ 폐기물 처리물량

공종		단위	처리 물량
			당초	변경	증.감
폐기물처리비	폐콘크리트	ton	10,117	13,038	증)2,921
	폐아스팔트콘크리트(유상)		7,141	11,975	증)4,834
	폐아스팔트콘크리트(재생)		1,410	-	감)1,410
	건설폐재류(벽돌, 블록 등 철거잔재)		2,000	66	감)1,934
	혼합건설폐기물		-	-	-

□ 총공사비 변경 내역

구분	금 액 (단위 : 원)
	당 초	변 경	증·감
공 급 가 액	771,309,909	931,984,545	증)160,593,636
부가 가치세	77,139,091	93,198,455	증)16,059,364
총 용 역 비	848,530,000	1,025,183,000	증)176,653,000

Ⅲ		조치계획

□ 위의 보고내용 및 관련규정에 따라 설계변경 및 계약금액조정 시행

□ 계약상대자에게 설계변경 내용 통보

Ⅳ		향후계획

□ 위 보고내용과 같이 설계변경(정산) 후 준공 처리

붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 공사별 실정보고 1부.

4. 공사별 폐기물 내역서 1부.  끝.