문서번호	정수시설과-3793
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이윤헌		함태광	12/20
			성호준
협 조
	주무관			노성제

2023년 전기설비 유지보수 공사 설계변경 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 전기설비 유지보수 공사 설계변경 계획 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 2023년 전기설비 유지보수 공사에 대하여 물량 증‧감 사항 반영, 제경비 정산 등을 위한 설계변경을 시행하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 구의아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사(장기계속공사)

○ 공사기간: 2023. 4. 12. ~ 12. 31.(총공사기간: 2023. 4. 12. ~ 2024. 3. 31.)

○ 계약금액: *********************************

○ 도 급 자: ********************

○ 공사내용: 정수센터 전기설비 정비 및 고장 발생시 긴급 보수

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 변경사유: 물량 증감사항 반영 및 제경비 정산

○ 계약금액 및 기간	(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
계약금액	**********	**********	****
총공사부기금액	**********	**********	****
공사기간	’23. 4. 12. ~ ’23. 12. 31.		변경없음
총공사기간	’23. 4. 12. ~ ’24. 3. 31.		변경없음

○ 주요 변경내용

- 공사 물량 증가: 절연전선(HFIX 2.5㎟) 등 23개 공종

- 공사 물량 감소: 접지동봉 설치(Φ16×1800L) 등 179개 공종

- 신규 공종 발생: 탄소접지봉 설치(Φ260×1000L) 등 8개 공종

- 기타 사항: 물량 변경에 따른 제경비 정산

○ 단가적용

- 물량 증감 공종: 계약단가 적용

- 신규 공종: 계약 시 낙찰률 적용

□ 조치의견

○ 위 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

○ 설계변경 심의위원회 내용

- 개최일시 : **********************

- 장    소 : *********

- 주요 심의사항

‣설계변경의 타당성

‣제경비 산정 및 적용 적정성 여부

‣물량변경의 적정성 여부

‣각종 제반 규정 준수여부 등

- 심의 위원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	******	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****
위 원	****	*****

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 내역 검증확인서 1부.

3. 설계변경 심의 설명서 1부.

4. 설계변경 심의 의견서(양식). 1부.  끝.