문서번호	물재생시설과-11685
결재일자	2021. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물재생기획팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
양해선	조장환	代조장환		11/10 한유석
협 조
	물재생기전팀장		최년수
	주무관		김익동

중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역

설계변경(2차) 시행 보고

2021.11

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 용역

설계변경(2차) 시행 보고

「중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계」용역의 내실 있는 추진을 위해  기술자문비 추가 반영 등을 위한 설계변경 시행코자 함

□ 용역개요

**************************************

*********************************

*******************

****************************************

○ 주요 과업내용

- 기초자료 수집 및 조사

- 현장조사(지형현황측량 767,000㎡, 토질조사 12공 등)

- 기본계획 검토/ **************

□ 추진경위

○ ’17. 4.25 : 물재생센터 도시복합재생거점 구축 추진계획

○ ’17. 8.25 ~ ’19.7.31 : 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립용역

○ ’19.10.15 : 중랑물재생센터 시설현대화 추진계획 방침

○ ’19.12.17 : 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본설계 시행계획

○ ’19.12.18 : 용역 입찰공고

○ ’20. 2.20/ 3.13 : 용역 계약․착수/ 착수보고

○ ’20. 4. ~ ’21. 6. : 설계 자문회의(13회)

○ ’21. 3./  ’21. 8.: 설계VE 심의/ 설계심의

○ ’21.11. 8. : 설계변경 요청((주)이산 등 5개사)

□ 용역 추진현황

○ 주요사항 검토결과

연번	주요 검토사항*******	검토결과
*	******************	· 전체 시설용량 ******* 유지 · 방류수 수질은 **** 수질기준 적용
*	****************	· 시설개선***********결정 ****************************
*	******************	************* 용량 검토
*	*********************	************ 시설용량 적용 · 향후의 시설은 **********
*	***************	******************************
*	**************	*********** 범용공법 적용 · 향후 단계의 ********* 확보
*	*****************	*********** 방식 추진
*	*************	****** 안전 규격 및 기준 검토반영
*	******************	· 예산범위 내 사업방안 검토
**	**************	******** 방안 추진

****************************************

□ 설계변경 내역

○ 계약금액 변경(공정율 97.5%, ’21. 10월말 기준)

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
기본설계	3,777,121	3,777,121	-
직접경비	621,097	615,539	감) 5,558	슬러지 성상분석 제외
조감도 제작	17,000	0	감) 17,000	제작 시기 미도래
기술자문회의	6,600	22,976	증) 16,376	자문 횟수, 설계VE 추가
소 계	4,421,818	4,415,636	감) 6,182
부가가치세	442,182	441,564	감) 618
계	4,864,000	4,857,200	감) 6,800

○ 변경 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계	40,802	34,620	감) 6,182	부가가치세 제외
슬러지 성상분석	5,558	0	감) 5,558	슬러지 분석 제외
기존시설 악취조사	11,644	11,644	-	악취 조사항목 변경
조감도(CG) 제작	17,000	0	감) 17,000	필요시 실시설계 단계 제작
기술 자문비 등	6,600	22,976	증) 16,376	자문 횟수, 설계VE 추가

- 슬러지 성상분석 제외 : 감 5,558천원

․ 슬러지 건조시설 이전 계획이 기본설계 단계에서 기존 시설을 활용하는   방안으로 변경됨에 따라 슬러지 성상분석 제외

- 기존 시설 악취조사 측정항목 변경 : 금액 변경 없음

********************************************* ***********************************

당초	변경	당초	변경
*****	****	**	**************
******		***	*****************
******		***	*******
******		*	********
*******

*******************************************

*******************************************

- 조감도(CG) 제작 제외 : 감 17,000천원

․ 조감도 제작은 향후 입찰 시 수정 보완된 설계에 의해 필요시 제작할 수 있도록 금회 기본설계에서 제외

- 기술자문비 추가 : 증 16,376천원

․ 기술자문비는 당초 11회 시행(6,600천원) 계획에서 설계 적정성 검토 등  자문회의 추가(총 14회) 및 설계VE 검토위원 수당(19,993천원) 설계반영 필요

․ 이후의 공사 입찰안내서 외부 전문가 자문 등을 위한 자문비 추가(2,983천원) 필요

□ 조치계획

○ 슬러지 성상 분석 및 조감도 제작 제외, 악취조사 측정 항목 변경, 외부 전문가 기술자문비 추가 반영 등을 위해 설계변경 시행하고 준공 시 정산처리

○ 용역 계약변경 의뢰(물재생시설과 → 재무과)

붙임 : 1. 설계변경 요청 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.