문서번호	시설개선과-2640
결재일자	2024. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
최용준		이균형	03/15
			代임재선
협조	운영기획과장		임재선
	주무관		代강석영

- 2024년 잠실야구장 환경개선공사 -  설계변경(1차-최종) 검토 보고

2024. 3.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

- 2024년 잠실야구장 환경개선공사 -

설계변경 (1차 - 최종) 검토 보고

"2024년 잠실야구장 환경개선공사" 에 대한 시행 중 실제시공에 따른

변경사항에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

□ 근    거

○ 시설개선과-2425(2024. 3 .11.) "시공사 실정보고 검토 보고"

○ 잠운본 제2024-10호(2024. 3. 7.) "잠실야구장 안전관련 환경개선공사 추가 요청"

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2024년 잠실야구장 환경개선공사

○ 공 사 비 : **********

○ 공사기간 : 2024. 1. 30. ~ 3. 22.

○ 시 공 자 : ****************

○ 공사내용

- 관람석 논슬립 도장 3,759㎡

- 외야석 통로 폴리우레아논슬립 904㎡

- 관리사무실 비상구(출입문) 설치 2개소

- 전광판 픽셀룸 후면 난간 설치 72개소

- 조명타워 점검계단 안전가드 설치 20m

- 본부석 야구망(그물망) 교체 680㎡

- 외야석 남자화장실 소변기 칸막이 설치 20개소

○ 추진경위

- 2024. 1. 10. : 발주방침

- 2024. 1. 12. : 공사발주

- 2024. 1. 29. : 공사계약 및 착공

- 2024. 3.  7. : 잠실야구장 관리본부 의견 접수

- 2024. 3.  8. : 시공사 실정보고

- 2024. 3. 11. : 시공사 실정보고 검토보고

□ 설계변경 내용

○ 사 유 : 야구장 관리본부 요청사항 및 현장여건 반영

○ 내 용

연번	공 종 명	내 용	수 량	공사비(천원)	비 고
1	외야석 통로 출입구 계단 논슬립 추가	관람객 안전 확보	92.4㎡	*****	*
2	내야 중앙석 내벽 수성페인트 재도장	품질 향상	135㎡	*****	*
3	외야석 지붕 전면 수성페인트 재도장	품질 향상	172㎡	*****	*
4	외부 기둥 상부 수성페인트 재도장	관람객 안전 확보	498㎡	******	*
5	홈,원정 임원실 및 경기운영임원실 개선공사	사용자 의견 반영	1식	*****	*
6	전광판, 조명탑 공사중 크레인 및 고소작업차 수량 조정	품질 향상	크레인(-1대) 고소작업차 (-3대)	*****	*
계(제경비 및 부가세 *******)					**********

□ 계약금액 조정

○ 공사비 증․감 내역

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		***********	***********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	**********	*********
	계	***********	***********	**********

************************

□ 조치의견

○ 실제 시공에 따른 변경사항에 대하여 설계변경 추진.

붙임  : 1. 시공사 실정보고 검토 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 도면, 계약금액조정검증확인서 각 1부.  끝.