아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	납품기한 연장 요청 의뢰[기전상황실 개선 사업 자동제어장치 제조구매]

우리 사업소에서 시행중인 『기전상황실 개선 사업 자동제어장치 제조구매』의 납품기한 연장을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 기전상황실 개선 사업 자동제어장치 제조구매

나. 계약금액 : 금133,164,790원(조달수수료제외) [조달수수료:1,322,050원]

다. 계 약 자 : 중앙아이엔티(주) 대표 이정명

라. 납품기한 연장사유

- 선행공정인 KT통신망 공사 지연으로 후속공정인 자동제어 납품기한 연장 필요

마. 연기기한

- 당 초 : 2023. 11.30. ~ 2024. 03.31.

- 변 경 : 2023. 11.30. ~ 2024. 04.30.(증 30일)

붙 임   1. 납품기한 연장 검토 보고서 1부.

2. 납품기한 연장 요청서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	홍정완		기전과장	03/25
문동하
협조자
시행	기전과-2576	(	2024. 3. 25.	)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41, 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1547	/전송	02-2210-1536	/	hjw4786@seoul.go.kr	/	부분공개(5)