문서번호	도로보수과-4179
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정병구		유은중	03/26
			손경철
협조
	주무관		맹우재

「'23/'24 제설작업 용역(장기계속)」

설계변경(2차분-정산) 검토보고

2024. 3.

서울특별시 서부도로사업소

(도 로 보 수 과)

「'23/'24 제설작업 용역(장기계속)」

설계변경(총차2회, 2차-정산) 검토보고

우리 사업소에서 시행하는 『'23/'24 제설작업 용역(장기계속)』과 관련하여 '24.03.15.자로 제설대책이 종료됨에 따라 제설작업 용역 설계변경(2차분)을 정산 설계변경 검토하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

□ "2023 회계연도 재난관리기금 사고이월 예산 재배정 알림"

(도로관리과-1381호, '24.1.22)

□ "제설대책추진 예산(사무관리비) 재배정 알림"

(도로관리과-2391호, '24.2.5)

□ "'23/'24년 제설작업 용역(장기계속) 2차분 계약시행 계획 보고"

(도로보수과-1527호, '24.2.5)

Ⅱ		용역개요 및 예산현황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : '23/'24 제설작업 용역(장기계속)

○ 용역기간 : '23.11.01. ~ '24.03.31.(151일)

- 1차분 : '23.11.01. ~ 12.31.(61일) / 2차분 : '24.01.01. ~ 03.31.(90일)

○ 용 역 비 : **************

- 1차분 : ************** / 2차분 : **************

○ 계 약 자 : **************

□ 예산배정현황

(단위 : 천원)

예 산 과 목	예산액	배정일
************************************************	*******	*********
*************************************************************	*******	*********

Ⅲ		정산 설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 비상근무 발령 및 결빙대비 대기에 따른 공정별 물량 증ㆍ감 정산

- 비상발령 횟수 : ***************************************

▸ 1차분 : ********************

▸ 2차분 : **************************************

- 2차분 공정별 물량 증ㆍ감 현황

******	***	**	**********				***
			***	***	***
*******	***	**	*****	*****	*	**
	***	**	*****	*****	*	*****
*****	***	**	*****	*****	*	***
	***	**	*****	***	*	***
*******	***	**	*******	*******	*	**
	***	**	*******	*******	*	***
*********	*******	**	*	*	*	*
*******	*******	**	***	**	*	***
*********	********	**	*****	*****	*	****
*******	********	**	*****	*****	*	***
************		**	*****	*****	*	***

※ **********************************************에 포함하여 정산처리

□ 정산 설계변경 내용

공 종	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
*****	***********	***********	*************
*****	***********	***********	****	***********
*****	***********	***********	*************

Ⅳ		조치계획

□ 상기 검토보고 내용과 같이 비상근무 발령에 의거 공종별 실제 근무한 사항으로 2차분 정산 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅴ		향후계획

□ '24.3.27 : 설계변경(총차2회, 2차1회) 계약의뢰(관리단속과)

□ '24.3.31 : 용역준공

붙임 : 1) 예산 재배정 공문 2부.

2) 설계변경내역서(총차분, 2차분) 각 1부.

3) 합의각서 2부.  끝.