아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(총차분 2회, 2차분 정산) 시행(23/24년 제설작업 용역(장기계속)-북부)

우리사업소에서 시행 중인「'23/24년 제설작업 용역(장기계속)-북부」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차분 2회, 2차분 정산)을 시행 및 준공하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 23/24년 제설작업 용역(장기계속)-북부

나. 용역기간 : 2023.11.03. ~ 2024.03.31.

- 1차분 : 2023.11.03.~ 12.31. / 2차분 : 2024.01.01. ~ 03.31

다. 계약금액 : *****************************

라. 계 약 자 : ***************

마. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
****		***********	***********	***************
* * *	***	**********	**********	*	****
	***	***********	***********	***************

바. 설계변경사유 : 제설대책 비상근무 발령 및 제설제 운반 등으로 인한 단순물량증가

사. 예산과목

- 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 재난안전관리실 도로관리과)

- 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비및 부대비, 시설비 (예산편성부서 : 재난안전관리실 재난안전정책과)

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(총차분,2회) 1부.

2. 설계변경내역서(2차분,정산) 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	정광민		도로보수과장	代이상구		북부도로사업소장	03/28
김만호
협조자
시행	도로보수과-3734	(	2024. 3. 28.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913, 북부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5431	/전송	02-945-5072	/	hwanhee2nd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)