신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)

「터널 집수정 덮개 형식 변경」

공사명

신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)

공사개요

· 규    모 : 도로건설(터널)

폭 4차로, 연장 2.48km

· 공사기간 : '10.10.08~'26.12.31

· 도 급 비 : 220,118백만원

· 시공사 : 지에스건설㈜ 외 4

· 감리단 : ㈜신성엔지니어링 외 3

· 차수 현황 : 14차(2024년도)

도급비 5,500백만원, 공기 '24.01.01~12.31

실정보고 사유

· 터널설계지침 개정에 따른 집수정 덮개 형식 변경

보고내용

· 주요 변경사항 : 집수정 뚜껑 형식 변경

- 개정지침 : 국도건설공사 설계실무 요령(2016년)

- 개정사유 : 터널 세척수 및 노면 오물 집수정 유입 방지

· 변경사항 비교

구분	당 초 (스틸그레이팅)	변 경 (스틸그레이팅 + 무늬강판)
구성
규격	430×480×75	430×492×75	430×492×4.5

· 타현장 사례

서부간선도로	제물포 도로

· 수량 증·감

**************************************************************************************************************************************************

· 공사비 증·감                                      (단위 : 천원)

********************************************************************************************************************************************************************************************

· 설계변경 근거

- 공사계약 일반조건 제21조 ④의 3.

⇒ 공사관련법령(표준시방서, 전문시방서, 설계기준 및 지침 등 포함)의

제·개정으로 인한 경우

감리단 의견

· 터널 설계 개정에 의한 형식 변경은 적정하다고 판단되며, 증가된 공사비는

공사계약 일반조건에 의하여 계약금을 조정함이 적정하다고 판단됨.

발주처 의견

· 지침 개정에 따라 보고된 내용이 적정한 것으로 판단되어 실정보고

승인통보하고자 함

결재

주무관

이승훈

터널건설과장

김소연

토목부장

04/18

代박운용

주무관

박웅교