문서번호	방재시설부-5259
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	04/23
			이동훈
협 조

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

건설폐기물 처리용역(잔여구간, 1차) 준공기한 재연기 검토 보고

2024. 4.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

건설폐기물 처리용역(잔여구간, 1차) 준공기한 재연기 검토 보고

「국회대로 지하차도(1단계) 건설폐기물 처리용역(잔여구간) 」(1차) 준공기한 재연기에 대한 검토보고 임

※ 관련근거 : 이산(S)2024-국회대로(건)-111호(2024.4.23.)

1		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 국회대로 지하차도(1단계) 건설폐기물 처리용역(잔여구간)

ㅇ 위    치 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 잔여구간

ㅇ 용역기간 : ’23.01.04.~’24.12.31.(1차 : ’23.01.04~’24.04.30)

ㅇ 용 역 비 : 금759,242,000원(일금칠억오천구백이십사만이천원정)
※ 1차 금460,870,000원

ㅇ 계 약 자 : (주)진흥중공업

2		보고내용

ㅇ 1차분 준공기한 재연기 사유

- 1차분 미반출 잔여수량에 대한 발생시기 감안하여 연기

※ 전회 연기(’23.12) : ’23.01.04~’24.04.30.,

금회 재연기(’24.04) : ’23.01.04~’24.05.31.

ㅇ 잔여수량 반출시기

구 간	잔여수량		반출시기	비 고
잔여구간-바이패스	80ton	2024.05.07. ~ 2024.05.20.

ㅇ 계약기간 조정

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
계약 기간	총차	2023.01.04. ~ 2024.12.31.	2023.01.04. ~ 2024.12.31.	-
	1차	2023.01.04. ~ 2024.04.30.	2023.01.04. ~ 2024.05.31.	증) 1개월
계약 금액	총차	759,242,000원	759,242,000원	-	금액 변경없음
	1차	460,870,000원	460,870,000원	-

ㅇ 계약수량 및 반출수량(1차)

구 분		계약수량	반출수량	잔여수량	비 고
전체	폐콘크리트	12,641ton	8,748ton	3,893ton	-
	폐아스콘	7,806ton	3,580ton	4,226ton
	혼합폐기물	21ton	0ton	21ton
1차	폐콘크리트	7,400ton	8,748ton	-1,348ton	- 설계변경 예정(’24년5월) - 금액 변경없음 - 형상변경에 따른 수량변경
	폐아스콘	5,015ton	3,580ton	498ton

3		책임건설사업관리기술인 검토의견

ㅇ 국회대로 1단계 공정 추진상 현재 폐기물 발생은 잔여구간으로 건설폐기물 1차분 잔여물량(폐콘크리트:35ton, 폐아스콘:45ton)에 대하여 ’25년 5월까지 처리 가능할 것으로 판단되는 바, 원활한 사업추진을 위해 건설폐기물처리용역(1차) 준공기한을 재연기하고자 함.

4		보고자 의견

ㅇ 잔여구간 건설폐기물 1차분 잔여물량에 대한 준공기한 재연기는 적정하다고 판단되며, ’24년 5월 폐기물 처리완료와 함께 설계변경이 조속히 시행될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 건설폐기물 처리용역(잔여구간)-1차 준공기한 재연기 검토보고 1부.  끝.