문서번호	인재기획과-5257
결재일자	2024. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
최창순		서선교	04/29
			김규룡
협조

청사 전기설비(수배전반) 교체 작업 계획

2024. 4.

서울시인재개발원

(인 재 기 획 과)

청사 전기설비(수배전반) 교체 설치 계획

휴일('24.5.4.~5.6.)에 실시되는 청사 전기설비 교체 설치와 동반하는 정전상황에 대비한 원 운영의 준비사항과 공사세부계획에 대하여 보고함

□ 추진 근거

ㅇ 청사 전기설비(수배전반) 교체 계획(기획과-911, '24.1.19.)

ㅇ 청사 전기설비 제작구매 설치에 따른 정전작업계획서 제출(기획과-5029, '24.4.24.)

□ 사업 개요

ㅇ 공 사 명: *******************

ㅇ 공사기간: *************************

********************************************

**********************************************

ㅇ 공사장소: ************************

ㅇ 공사내용: ************************

□ 세부 추진 계획

ㅇ 사전 준비 작업[5. 3.(금)]

시 간	내 용	비 고
*****	************************************ *************************************	행정망, 내선전화 미운영
18:20	· 정전대비 시설물(PC, 전자기기 등) 점검 및 순찰 · 배움관 우측 주차장 장소 마련 협조

ㅇ 1일차[5. 4.(토)]

시 간	내 용	비 고
07:30	작업자, 감리용역, 수배전반 물품 현장 도착
07:45	작업자 현장 안전교육 실시
07:54	CCTV 등 미운영 설비에 대한 정전 사전 조치
*****	***********
*****	***********************	한국전력
*****	************* ******************************* *********
08:30 ~ 18:00	철거	철거 작업 종료시 까지 (야간작업 병행)
18:20	주변정리 및 정돈, 안전점검 실시 후 철수

ㅇ 2일차[5. 5.(일)]

시 간	내 용	비 고
07:30	작업자, 감리용역, 현장 도착
07:45	작업자 현장 안전교육 실시
07:55 ~ 18:00	저압반 설치	설치 작업 종료시 까지 (야간작업 병행)
18:20	주변정리 및 정돈, 안전점검 실시 후 철수

ㅇ 3일차[5. 6.(월)]

시 간	내 용	비 고
07:30	작업자, 감리용역, 현장 도착
07:45	작업자 현장 교육 실시
07:55 ~ 16:00	특고반 설치	설치 작업 종료시 까지 (야간작업 병행)
*****	************	작업 경과 보고 후 시간 조율 예정
*****	***************************
20:00	수전 후 시운전 완료
20:20	주변 정리 및 청소
20:30	작업 종료
21:00	정보통신실 운영 시작

□ 행정사항

ㅇ 정전 대비 부서별 협조사항

가. 인재기획과

- 정전대비 PC, 전자기기 등 사전 전원 OFF 협조

- 정보통신실 서버 미운영 조치(행정망, 전화 미운영): 디지털교육팀

- 초과근무 전자시스템 미운영으로 인한 수기 작성 준비: 교육지원팀

· 정전기간동안 PC전원차단과 행정망 등 접속이 중단되므로 초과근무자제 안내메일 발송

- 무인경비시스템 전원차단으로 시건장치 설치: 교육지원팀

- 당직근무 비상연락망 구축 및 운영: 교육지원팀

· 당직사령 및 현업근무자(공공안전관 등) 순찰강화

- 정전에 따른 필요조치 공문 발송: 시설관리팀, 교육지원팀

· 쑥쑥어린이집, 행복한베이커리(푸르메재단), 구내식당(푸디스트) 등 물품보관 및 관리 철저요청

· 정전안내 공문 및 메일 발송

- 주차시스템 일부 운영(비상발전기 운영시간에만 운영): 시설관리팀

- 배움관 우측 주차장 장비 반입·출을 위한 장소 협조: 시설관리팀

나. 인재채용과

- 정전대비 PC, 전자기기 등 사전 전원 OFF 협조

- 무인경비시스템 미운영으로 인한 보안시설물(편집실 등) 시건장치 철저

- 정전 후 진행되는 업무 사전 준비 철저

다. 인재양성과

- 정전대비 PC, 전자기기 등 사전 전원 OFF 협조

- 정전 후 진행되는 교육운영 사전 준비 철저

ㅇ 공사에 따른 추가비상당직 근무 실시

구분	근무일시	근무장소	근무시간	근무자	비 고
일직	5. 4.(토)	기전실	09~18시	최창순	현장 공사감독, 안전지도 및 시설물 순찰
				정명구
				한정우	시설물 점검 및 순찰
숙직	5. 4.(토)	기전실	18~09시	최창순	시설물 점검 및 비상발전기 운영
일직	5. 5.(일)	기전실	09~18시	최창순	현장 공사감독, 안전지도 및 시설물 순찰
				정명구
				김성수	시설물 점검 및 순찰
숙직	5. 5.(일)	기전실	18~09시	김성수	시설물 점검 및 비상발전기 운영 감독
일직	5. 6.(월)	기전실	09~18시	최창순	현장 공사감독, 안전지도 및 시설물 순찰
				정명구
				한정우	소방 및 시설물 점검 및 순찰
				최경수

붙임.   비상연락망 1부.  끝.