문서번호	시설보수과-765
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	02/28 정진오
협 조
	도로보수과장			국중진
	교량보수과장			김종대
	주무관			김중철
	주무관			박성민

2014년 해빙기 도로시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

성동도로사업소

(시설보수과〕

2014년 해빙기 도로시설물 안전점검 계획

2014년 해빙기에 안전사고 발생 위험성이 높을 것으로 예상됨에 따라

도로시설물 안전점검을 시행하여 안전사고를 미연에 방지하고, 취약시기 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 공 문

2014년 도로시설물 안전점검 추진 계획(도로시설과-828, 2014.01.16)

2014년 해빙기 안전관리 계획(도시안전과-3532, 2014.02.14)

2014년 해빙기 도로시설물 안전점검 시행(도로시설과-3236, 2014.02.26)

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 시설물(94개 시설물)

※ 시설보수과 55개소, 교량보수과 30개소, 도로보수과 9개소

(단위:개소)

구분		합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개	옹벽
계		94	4	40	11	8	2	3	14	3	9
시설보수과	1종	9		5	1					3
	2종	16		6	2			3	5
	법정외	30		17	6				7
	소계	55		28	9			3	12	3
교량보수과	1종	8	4	2	2
	2종	10		4		4			2
	법정외	12		6		4	2
	소계	30	4	12	2	8	2		2
도로보수과	법정외	9									9

추진기간 : 2014. 2. 28 ~ 3. 31

〇 점검기간 : 2014. 2. 28  ~ 2014. 3. 17(18일간)

〇 정비기간 : 2014. 3. 18  ~ 2014. 3. 31(14일간)

점검반 편성

〇 성동도로사업소 : 3개반 17명

								성동도로사업소 (소 장)
	시설보수과장							교량보수과장							도로보수과장
	최태석		김근수					김형섭		김중철					(옹벽담당) 박성민		(구담당) 김홍기
	진하영		임승민					김근섭		이기승							홍수종 최영서 하승환

〇 외부전문가 : 34명(주치의 : 17명 + 외부전문위원 17명)

점검방법 : 시설물 담당자 및 외부전문가 합동점검 실시

〇 시설별 안전점검자 구성 현황

ㆍ 1종 시설물(17개소) : 직원(정,부) 2인+주치의 1인

ㆍ C등급 이하 시설물(5개소) : 직원(정,부) 2인+주치의 1인, 외부전문위원 2인

- 동호대교, 청량리1고가차도 : 직원(정,부) 2인+주치의 1인

- 장 안 교 : 직원(정,부) 2인+외부전문위원 2인

※ 교량 교대 배면 일부 균열 발생에 따른 긴급점검 병행(하상우,이채규)

- 이문고가, 중랑교 : 직원(정,부) 2인+외부전문위원 1인

※ 현재 보수·보강 공사중

ㆍ 2종 및 법정외 시설물(72개소) : 직원(정,부) 2인+외부전문가 1인

시설별 안전점검자 현황

〇 시설보수과  55개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외 부 전 문 가
					성 명	소요일
1	최태석(정) 진하영(부)	14	1종	워커힐고가차도	고래건	1일
				면목천복개도로	안홍준	1일
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널	안홍준	1일
				무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도	고래건	1일
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리,신답고가차도, 청량리1고가차도(별도)	한삼희	2일
2	김근수(정) 임승민(부)	14	1종	응봉교	제 외	공사중
				청계천복개도로(좌안)	조광현	1일
			2종	군자교, 성동교, 금호터널	최영묵	1일
				장안교(별도), 장평교, 능산지하차도	전명일	1일
			법정외	면목교, 전농교, 답십리굴다리지하차도	최영묵	1일
				용마고가차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도	전명일	1일
3	임승민(정) 이앙식(부)	14	1종	이화교	우재경	1일
				비우당교	김수철	1일
				청계천복개도로(우안)	이종재	1일
			2종	중랑교, 신답지하차도	이상민	1일
				응봉지하차도	김영환	1일
			법정외	청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도	이상민	1일
				동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 재2제기교	김영환	1일
4	진하영(정) 최태석(부)	13	1종	성북천교	서문동군	1일
				용비교	박윤재	1일
			2종	영동대교북단고가차도	송준민	1일
			법정외	뚝섬고가차도, 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도	송준민	1일
				고산자교, 먹골교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청)	최호진	2일

※  C등급(4개소) : 장안교, 이문고가차도, 청량리1고가차도, 중랑교

공사중(2개소) : 응봉교, 마장지하차도

〇 교량보수과 30개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외 부 전 문 가
					성 명	소요일
1	김형섭(정) 김근섭(부)	7	1종	동호대교	고재상	1일
				영동대교북단E교	하진수	1일
			2종	송정교, 뚝도1교, 뚝도2교	원용만	1일
			법정외	성수대교북단지하차도, 영동대교북단D램프	유근무	1일
2	김중철(정) 이기승(부)	9	1종	성수대교	양승이	1일
				자양고가	김영수	1일
			2종	중랑상단IC, 중랑하단IC	유병율	1일
				군자상단IC, 군자하단IC	이성혁	1일
			법정외	면목천교, 중랑교동측언더패스, 중랑교동측언더패스	안병직	1일
3	김근섭(정) 김형섭(부)	7	1종	영동대교	최장환	1일
				정릉천고가	정시욱	1일
			2종	묵동천교, 두물다리교	박정용	1일
			법정외	봉화교, 신내1교, 신내2교	홍승근	1일
4	이기승(정) 김중철(부)	7	1종	광진교	유기운	1일
				아차산교	채이균	1일
			2종	광나루지하차도, 천호대교북단강변북로U-TURN차로교	최윤정	1일
			법정외	테크노차도육교, 잠심대교북단램프C, 잠실대교북단램프D	구자갑	1일

※ C등급(1개소) : 동호대교

〇 도로보수과 9개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외 부 전 문 가
					성 명	소요일
1	박성민(정) 김홍기(부) 홍수종(부) 최영서(부) 하승환(부)	9	법정외	동대문구1개소(김홍기) 광진구 2개소(홍수종) 성동구 2개소(최영서) 중랑구 4개소(하승환)	하상우	1일

※  1) 점검기간내 시설물 담당자는 외부전문가와 일정을 조정하여 실시

2) 외부전문가 점검 참여 불가 등 변경사유 발생시 자체적으로 교체 시행

Ⅲ		세부점검 내용

주요 점검사항(‶별첨 4‶ 부재별 점검사항 참조)

〇 공통사항 : 지반 침하, 전도 및 배수시설, 동결 융해, 위험시설물 적치,

시민불편사항 등 해빙기 취약부분 집중점검

ㆍ 교량 : 교량 받침 및 신축이음 거동상태, 신축이음 퇴적, 배수시설 상태 등

ㆍ 터널 : 갱구부 사면 및 옹벽 파손, 배수로 막힘 및 파손 등

ㆍ 지하보도 : 배수시설상태, 벽체 타일 파손여부 등

ㆍ 복개구조물 : 구조물(슬래브, 벽체) 균열, 누수 및 기초하부 세굴여부

〇 건설공사장 : 지하수 유출ㆍ유입으로 발생한 연약지반 붕괴위험, 계측관리

상태, 강우대비 배수 및 유입수 처리대책

〇 절개지ㆍ낙석 위험지역 : 겨울철 결빙된 토사ㆍ암반층 붕괴위험 대비 낙석                               방지망, 방재책 등 안전시설 및 누수, 유지관리 상태 등

〇 축대ㆍ옹벽 : 노후 위험 축대 및 옹벽의 배부름 및 토사 함몰, 배수구멍 기능                   유지상태, 배수시설관리 상태 등

〇 겨울철 동안 훼손된 부속시설물 등 확인

Ⅳ		지적사항 조치

경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지 보수업체로 하여금 신속히 작업지시하여 보수

구조물 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 외부전문가 등과 합동점검 실시하고 조치계획 수립

Ⅴ		행 정 사 항

안전점검 시행 결과 제출(도시안전과, 도로시설과)

〇 점검실적 제출 : 2014. 3.17까지

〇 조치결과 제출 : 2014. 3.31까지

점검수당 지급

〇 안전점검 결과 보고서에 의거 점검수당 지급

⇒ 해빙기 안전점검 결과 보고에 의거 해당부서에서 지급

※ 외부전문가 수당 : 200,000원/인ㆍ회

〇 예산과목

ㆍ 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물              안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

첨부  1. 안전점검 점검결과(양식1, 집계) 1부.

2. 안전점검 보고(양식2) 1부.

3. 외부전문가(해빙기) 명단 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

5. 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 계획 1부.  끝.