문서번호	기전과-5827
결재일자	2016.5.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
협조

공사기한 연장 검토보고

- 원효대교 기전시설물 이설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

서부도로사업소

(기전과)

공사기한 연장 검토보고

- 원효대교 기전시설물 이설공사 -

원효대교 기전시설물 이설공사 시행중 선행 공정인 토목 공정 지연으로

인하여 공사기한 연장에 대한 검토 보고 임.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 원효대교 기전시설물 이설공사

○ 공사규모

- 전선관로(전선포함) 11개소 130m 철거 설치

- 가로등 주 2본 이설

○ 공사기간 : 2016. 3.15 ~ 2016. 6. 2

○ 공사금액 : *************

○ 계 약 자 :****************

□ 추진경위

○ 2016.2.19 : 공사 협조요청(교량관리과)

○ 2016.2.23 : 예산 재배정

○ 2016.2.24 : 공사발주

○ 2016.3.15 : 공사계약

○ 2016.5(현재) : 전선 임시가설

□ 공사기한 변경 검토

○ 공사기간 변경

공사기간		변경 사유
당초	변경
2016.3.15.~ 6.2	2016.3.15.~ 9.30	- 선행 공정인 토목 공정의 지연으로 인하여 공사 기한 연장 사유 발생

○ 공사기간 변경 사유 : 절대 공기 부족

○ 공사기간 연장 귀책 : 서울특별시(서부도로사업소)

□ 예산과목: 교량관리, 한강교량관리, 원효대교보수공사, 시설비

□ 보고자 의견

○ 본 공사의 선행 공정인 토목공사 공정이 지연되고 있어 공사 기한을

2016년 9월 30일까지 연장하여 시행 함이 가하다고 사료 됨.  끝.