-상권 안내 디자인 표지판 제작·설치 사업 -

과업지시서

(영동전통시장)

2019. 10.

강 남 구

〔지역경제과〕

- 상권 안내 디자인 표지판(조형물) 제작·설치 사업 -

과업지시서

1. 과 업 명 : 상권 안내 디자인 표지판(조형물) 제작·설치 사업

2. 과업의 목적 : 강남지역 주요 상권에 조형미와 상징성을 갖춘 ‘상권안내 표지판’을 설치하여, 이용 고객의 편의를 증진하고 상권 홍보를 통한 지역경제 활성화 도모

3. 기본방향

가. 국내외 관광객에 차별화된 상권 이미지 제공 및 관심과 흥미를 끌  수 있는 작품으로 상권 진입로 위치에 설치.

나. 작품의 규모는 각 상권별로 업체의 창작 의도에 따르되 조형미와 상징성을 갖춘 심플하고 세련된 디자인으로 주변경관과 조화를 이루어야 하고 서울시 공공건축물의 통일된 이미지 형성을 위한 디자인 서울 가이드라인 정책에 맞도록 디자인

다. 시각적 혼란을 초래하는 원색 및 과도한 표기를 지양하고, 재료 자체의 색이나 무채색, 저명도, 저채도의 색채를 기본으로 사용

라. 유지가 용이하고 관리비용이 최소화 되도록 안전성을 고려하여 제작․설치함.

마. 조형물의 완성도를 높이고 야간에도 감상할 수 있는 조명설치 계획을 포함하되, 지나치게 화려한 조명시설은 지양하고, 조명 최소 설치

바. 조명설치 계획에는 고효율·절전형 조명기구(예:LED)를 채택하여야 하며, 조명시설 컨트롤 박스 등의 설치비를 포함

사. 친환경성과 내구성을 고려한 재료 사용으로 지속 가능한 디자인을 실현하여야 함.

아. 제안자는 전문가 자문 및 상인조직 의견수렴 등 긴밀한 협조체계 유지하고 관련규정 및 제반규정에 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 계획

4. 과업기간 : 계약체결일로부터 60일 이내

5. 계약금액 : 금100,930,000원(금일억구백삼십원)

6. 과업범위

가. 기획·디자인, 기본설계 및 실시설계도서(시방서, 제품사양서, 설계내역서 등),

조감도 등 제안 기본도서 작성

-  종류, 형식, 형태, 크기, 주제는 규정하지 않으며 창의적 아이디어로 하되,   서울시 공공건축물의 통일된 이미지 형성을 위한 디자인 서울 가이드 라인   정책에 맞도록 디자인

-  상징물은 주변 환경과 조화를 이룰 수 있도록 하고 시공시 안전성을  최대한 고려한 재로로 사용하여야 함

- 설계도면, 제품사양서, 기타 이에 수반되는 업무와 발주기관 요구사항 등을 작성, 제출

나. 구조기술사에 의한 구조안전확인(구조안전계약서 등)

다. 상권 안내 디자인 표지판(조형물) 제작․설치, 부대공사(주변정비 등) 등 시공

라. 기타 발주처가 요구하는 사항(실시설계 반영)

- 상권 내부에 게시판 설치

- 설치 예정지역에 기존에 설치돼 있는 표지판은 수리가 필요한 부분이 있는 경우 그 부분을 수리하여 영동전통시장 내부로 이동 설치

- 기존에 설치되어 있는 표지판(조형물) 폐기

- 학동로 변, 강남대로 변 상징조형물 별도 설치

- 강남대로 조형물의 균형미와 영동전통시장의 홍보 시안성을 유지하고 1층 광성약국 간판을 가리지 않도록 높이 조정하여 설치

7. 설치장소 및 규모 : 영동전통시장 출입구 2개소(학동로변, 강남대로변)

8. 작품규격

가. 높이 5m 이내의 규격으로, 주변건물 및 경관과 조화를 이룰 수 있어야 하며 상권 진입로로 연결되는 위치에 설치하여야 함.

나. 빛 반사 등으로 인하여 차량통행에 지장이 없어야 하며 시설물로 인하여 교통흐름과 보행에 지장이 없어야 함.

다. 상권 안내 디자인 표지판(조형물) 기초 등 설치에 필요한 견고성, 내구성, 안정성 등 일체사항을 충분히 고려하여야 함.

9. 작품재질

가. 상권 안내 디자인 표지판의 주재료는 야외인 점을 고려하여 옥외 환경에서 장기간 견딜 수 있는 견고성과 내구성, 구조적인 안전성이 충분히 확보되는 재질 사용할 것.

나. 하절기 또는 동절기의 온도와 강수, 강설 등의 요인에 의해 형태나 색채가 변화되지 않도록 시방기준을 정하여야 함.

다. 영구보존이 가능한 재질로 조성할 것.

10. 준수사항

가. 과업수행방법

- 과업은 계약상대자에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항으로 하며, 계약체결 이후 10일 이내에 공공조형물 심의위원회의 심의를 받은 후 과업에 착수하여야 하며, 과업착수 이전에 공공조형물 심의도서, 착수계, 과업수행계획서 등 제반서류를 제출하여야 한다.

- 과업 수행업체는 본 과업의 목적, 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 발주처가 의도하는 목적 및 방향에 맞게 본 과업을 수행하여야 한다.

- 본 과업수행에 있어 제안된 각종 디자인을 변경하고자 할 때에는 발주기관과 반드시 협의하여 선정하여야 한다.

- 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항이라도 과업의 충실한 수행 및 목적달성을 위하여 추가․보완이 필요한 사항이 있을 시에는 이를 이행하여야 한다.

- 본 과업으로 인하여 과업 수행업체가 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 과업 수행업체는 그 손실을 보상하여야 한다.

- 본 과업의 수행과 관련하여 발생되는 제반 문제에 관해서는 발주처와 협의하여야 하고, 발주기관의 요청에 따라 발주기관이 운영하는 관계 전문가, 각종 심의(자문)을 받아야 할 필요가 있는 경우 심의(자문)에 필요한 관련 자료를 발주기관과 협의하여 준비한다. 양자 간 이견이 있을 때에는 발주처의 의견을 우선적으로 반영하여야 한다.

나. 책임한계

(보안사항)

- 계약상대자는 본 사업의 성공적 추진을 위하여 보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

(안전관리)

- 본 과업수행에 따른 안전관리 대책을 수립하고, 안전관리 미흡으로 발생되는 모든 민･형사상의 책임은 계약상대자가 진다.

다. 업무협의

- 계약자는 과업의 효율적 추진을 위하여 발주기관과 과업진행상황 등에 대해서 필요시 수시로 업무협의를 갖는다.

라. 기타

- 본 과업내용에 명시되지 아니한 사항 (상인요구 사항, 기타) 등이 발생할 경우 발주기관과 협의하여 성실히 수행하여야 한다.

- 또한 관련 규정에 따른 하자보수기간을 준수 하여야 한다.

마. 계약해지

- 다음과 같은 경우 계약을 해지 할 수 있다.

․ 사전협의 없이 과업의 내용을 무단으로 변경하는 경우

․ 과업 목적․취지와 상이하거나 현저히 미달되는 경우

․ 기타 정당한 요구사항을 이행하지 아니하는 경우

․ 과업 수행자의 잘못 등으로 인해 계속적으로 사업이 미루어질 경우

지체 상환금을 부여한다.

바. 보안사항

- 과업수행업체가 사업을 수행하면서 취득 또는 작성하는 성과품에 대한  소유권은 발주기관에 있으며 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하여서는 아니 된다.

- 보안사항 불이행으로 발생하는 보안 사고에 대한 민․형사상의 책임은 과업 수행업체가 진다.