관급자재 납품기한 연기 검토 내용

1. 공 사 개 요

가. 공 사 명 : 양화 한강공원 친수공간 조성공사(조경)

나. 도 급 액 : 금738,947,000원

다. 공사기간 : ┌ 1차  - 2013. 12. 27 ~ 2014. 10. 26

└ 총차 - 2013. 12. 27 ~ 2014. 12. 26

라. 발 주 처 : 한강사업본부 생태공원과

마. 도 급 자 : 정나라건설(주) 대표 이완규

2. 관급자재 현황

계 약 명	품 목	수 량	계약금액	납품기한	계약자	비 고
계		1900매	64,600,000원
관급자재 레미콘, 식물매트 구매-양화 친구공간 조성공사	기타화초 (물억새 야자섬유매트)	600매	20,400,000원	2014.1.30	지엔지농원
	기타화초 (수크령 야자섬유매트)	1300매	44,200,000원	2014.1.30	지엔지농원

3. 검 토 내 용

가. 납품기한 연기사유

- 동절기 공사중지에 따른 선행공정 지연으로 관급자재 납품기한 연기가 필요함(GNG 20140116-1호, 2014.01.17)

나. 납품기한 연기 요청 내용

- 당 초 : 2014. 01. 30

- 변 경 : 2014. 10. 26

다. 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 납품기한 연기요청 공문 1부

2. 납기연기 동의서 1부.  끝.