투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(산지방재과장)
(경유)
제 목	산사태예방사업 관련 예산배정 요청

1. 산지방재과-1931(2018. 2. 26)호와 관련입니다.

2. 위 호로 예산배정되어 우리 사업소에서 시행중인 “ 2018년 산사태예방공사(남산 등 7개소)“ 공사시행 중 다음과 같은 문제점이 발생하여 공사가 지연되고 있으니, 공사가 정상 추진될 수 있도록 필요 예산배정 등 조치하여 주시기 바랍니다.

(문제점)

◯ 위 치 :  중구 예장동 산5-6번지 일대(숭의여대, 숭의초등학교 주변)

◯ 현 황 : 남산공원으로부터 흘러내리는 토사 방치, 일부 사면 붕괴, 시설물 노후 등으로 학생들의 안전을 위헙하고 있어 남산 북측 순환로와 연결되어 있는 등산로를 학교측에서 일방적으로 폐쇄한 상태이며, 이에 대한 안전조치를 요청하고 있음.  현재 공사에 반영 추진하고 있는 낙석방지책 및 방지망 설치를 위해서 진출입로가 있는 학교 측의 협조가 필요한 사항이나 선 안전조치를 요청하고 있는 사항임.

◯  대  책 : 학교측 요청수용 후 공사추진

◯  소요예산 : 50,000천원

- 산돌쌓기 :    200㎡ × 100,000원 = 20,000,000원

- 관목식재 : 50,000주 ×    6,000원 = 30,000,000원.

붙임 현황사진 1부. 끝..

	중부공원녹지사업소장
주무관			녹지관리팀장			녹지관리과장
협조자
시행	녹지관리과-2679	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5944	/전송	02)3783-5949	/		/	대시민공개